투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	설계변경 시행(2016년 교통사고 잦은 곳 개선공사<교통신호기>)

우리사업소(기전과)에서 시행 중인 『2016년 교통사고 잦은 곳 개선공사(교통신호기)』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하여 공사 준공에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2016년 교통사고 잦은 곳 개선공사(교통신호기)

2. 계약금액 : 금195,234,090원(일억구천오백이십삼만사천구십원)

3. 계약기간 : 2016. 06. 16. ~ 11. 30.

4. 계약업체 : 가인전력(주) 대 표 김 윤 수

5. 설계변경 내역

가. 설계변경금액

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증/감
도급비	공 급 가 액	177,485,537	187,590,819	10,105,282	증
	부가가치세	17,748,553	18,759,081	1,010,528	증
	계	195,234,090	206,349,900	11,115,810	증

나. 설계변경사유

① 미관향상 및 보행자 편의고려에 따른 신규물량 발생 및 시공물량증감

② 제경비 정산

6. 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화

교통사고 잦은 곳 개선, 시설비

붙    임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 원가검증 1부.

4. 설계변경 방침서 1부. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
주무관	전상은		주무관	김용문		기전과장	11/25 代김용문
협조자	주무관	노미경		계약1팀장	조현
시행	기전과-6199	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02-3284-5433	/전송	02)3284-5470	/		/	부분공개(6)