문서번호	시설보수과-6689
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김근모		윤승범	11/25 代한병연
협조
	주무관		최승룡

- 건축시설물 유지보수공사(연간단가) -

설계변경(정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

서울특별시 중랑물재생센터

(시설보수과)

설계변경(정산) 보고

“건축시설물 유지보수공사(연간단가)”에 대하여 아래와 같이 시공물량 증·감   사항이 발생하여 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

공사 현황

○ 공 사 명 : 건축시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 계약금액 : 189,959,000원

○ 공사기간 : 2016. 03. 25 ～ 2016. 12. 31

○ 계 약 자 : ㈜보광티앤씨  대표 윤 채 호

보고내용

○ 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 반영

- #3유입동 옥상방수 및 케익야적장 설치공사 추가시행으로 물량증가

○ 주요 변경내용

구 분	공 종	규 격	단위	당초	변경	증·감
시설물 보수	기존시트방수 철거	T=2.5cm	㎡	1	864	증)863
	수성페인트칠	롤러칠, 2회	㎡	3,000	1,033	감)1,967
	모르타르 철거	바닥	㎡	150	804	증)654
	모르타르 타설	바닥 50mm	㎡	0	804	증)804
	에포탄 방수	바닥 3T, 벽체 1T	㎡	0	959	증)959
	우레탄방수	바닥 3T, 벽체 1T	㎡	900	1,760	증)860
	텍스 및 합판 철거	천정, 벽체	㎡	1	351	증)351
	무근콘크리트 깨기	바닥	㎡	1	98	증)97
	와이어메쉬 깔기	#8, #6-150*150	㎡	1	1,292	증)1,292
	방화문 교체	문틀, 도아록 별도	㎡	30	23	감)7
	잡석지정	혼합골재, T25	㎡	0	81	증)81

※ 케잌야적장 : 바닥콘크리트 균열방지용 잡석지정 공종 추가시공

설계변경 금액 (※건강·연금보험료 및 환경보전비 정산반영)

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 공 사 비		189,959,000	342,617,000	증)152,658,000	※ 낙찰률 적용금액임.
도급비	공급가액	172,690,000	311,470,000	증)138,780,000
	부가가치세	17,269,000	31,147,000	증)13,878,000
	계	189,959,000	342,617,000	증)152,658,000

조치 내용

○ 추가소요 공사비는 본 공사 및 공통분야 시설비 집행 잔액을 사용하며,

- 추가소요 공사비 : 152,658천원

○ 위와 같이 물량 변동사항을 반영, 설계변경 시행 후 재계약코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 추가공사 소장방침서 2부.

3. 설계변경 계약심의 법령검토서 1부.  끝.