문서번호	도로보수과-5898
결재일자	2016.11.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
홍수종		이상호	11/25 이종엽
협조
	주무관		하승환

2016년 노면표시 유지보수공사(연간단가) 설계변경(1차) 검토 보고

2016. 11.

성동도로사업소

(도로보수과)

2016년 노면표시 유지보수공사(연간단가)

설계변경(1차) 검토 보고

‘16년 자전거도로 및 도로교통 개선사업 노면표시와 굴착복구 시행도로

정비공사 노면표시 등 추진계획 방침에 의거 추가시행한 공사물량 반영에 따른 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ ㈜트래픽스 감리 노면표시 유지보수공사(연간단가) 제1회 설계변경 검토의견서 보고         : TR-6-1120(2016.11.23.)

○「자전거 유지보수공사(노면표시)」예산 재배정에 따른 추진계획

: 도로보수과-2489(2016.5.30.)

○「2016년 도로교통소통개선사업」예산 재배정에 따른 공사 추진계획

: 도로보수과-2508(2016.5.31.)

○「2016년 교통사고 잦은 곳 개선」추진계획 보고 : 도로보수과-2516(2016.5.31.)

○「2016년 굴착복구 시행도로 정비」추진계획 : 도로보수과-2787(2016.6.20.)    ○「2016년 보행자 무단횡단 교통사고 예방을 위한 교통사고지점 안전시설보강」 추진계획 보고

: 도로보수과-2849(2016.6.22.)

○「자전거도로 유지보수(시설개선)」예산 재배정 및 공사 추진계획 보고

: 도로보수과-4003(2016.8.22.)

○「자전거도로 유지보수, 소방관서 긴급출동, 도로교통소통개선」예산 재배정 및 공사 추진계획 보고

: 도로보수과-4996(2016.10.13.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 노면표시 유지보수공사(연간단가)

○ 규    모

- 차선도색 252,810m, 차선제거 6,994m, 차선밑그림 74,000m

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : *****************

○ 공사기간 : 2016. 3. 15. ~ 2016. 12. 31.

○ 공 정 률 : 90%

□ 보고내용

○ 2016년 자전거도로 유지보수(노면표시) 및 도로교통 개선 등 소규모

도색 정비사업 예산 재배정에 따른 물량증가 반영

○ 2016년 굴착복구 시행도로 정비공사구간 노면표시 시행으로 물량증가 반영

□ 설계변경내용

○ 주요공종 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
차선도색(백색)	도색,15cm(수동식)	m	173,810	236,752	증 62,942
차선도색(황색)	도색,15cm(수동식)	m	73,000	92,147	증19,147
차선도색(청색)	도색,15cm(수동식)	m	6,000	6,808	증808
차선제거	건식흡입형	m	6,994	17,430	증 10,436
차선밑그림		m	74,000	131,145	증57,145

○ 변경금액

공 종	금 액(원)			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
*	***********	*************	**************
***	***********	***********	***************
*****	***********	***********	***************
***	*********	*********	*****************

□ 예산과목

○ 교통운영과,도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물 관리, 노면표시선 도색 및 제거, 시설비(824,600천원)

○ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착 복구(도로굴착복구기금),

도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비, 시설비(260,000천원)

○ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발),

노후포장도로정비공사, 시설비(90,000천원)

○ 보행자전거과,자전거이용활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설 확충

및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비(105,220천원)

○ 교통운영과,도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화,

도로교통 소통 개선, 시설비(25,666천원)

○ 교통운영과,도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화,

교통사망사고 줄이기 사업, 시설비(100,476천원)

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 예산금액 범위내에서 공종별 물량조정 반영하여 설계변경 시행 및 사업추진에 만전을 기하고 함.

첨  부 : 1. 감리 기술검토 의견서 1부.

2. 관련 방침서 1부.

3. 설계변경내역서 1부

4. 제비율검증결과 1부.  끝.