문서번호	기전과-9473
결재일자	2016.11.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		11/25 박심근
협 조
	주무관		이명호

『교통신호기 유지보수공사(신설및개량)』

제4차 작업지시 실정보고 검토보고

2016. 11.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통신호기 유지보수공사(신설및개량)』

제4차 작업지시 실정보고 검토보고

교통신호기 유지보수공사(신설및개량)의 제4차 작업지시 건에 대하여 실정보고가 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 기전과-6652호(2016.08.24.) ‘4차 작업지시’

○ ㈜건영이앤시 건영 본16-11-18호(2016.11.24.)

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 교통신호기 유지보수공사(신설및개량)

○ 계약자 : ㈜거승이엔씨 대표 김주완

○ 계약금액 : *******************************

○ 공사기간 : 2016. 03. 14. ∼ 2016. 12. 31.

○ 감 리 원 : 책임감리원 조순재

Ⅲ

실정보고 현황

○ 보고내용                                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변경후	비 고
1차	84,253,400	21,340,000	현장여건에 맞게 물량 변경 설계오류 및 누락으로 수정 예산 부족으로 공사 타절 신호운영실과 서울지방경찰청의 의견이 상이하여 DB배정 불가로 작업 불가

※감액 : 62,913,400원

Ⅳ

검 토 결 과

○ 교통신호기 유지보수 제4차 작업지시의 실정보고를 검토한 결과 현장실정 및 설계오류등의 감액분(62,913,400원)을 이후 설계변경에 반영하고자 합니다.

첨  부 : 제4차 작업지시 실정보고(신설및개량) 1부.  끝.