문서번호	정수시설과-12426
결재일자	2016.11.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	11/25 이성락
협조

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

[풍납취수장 침사지 준설 및 하수관부설 공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.11.

영등포아리수정수센터

정수시설과

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

풍납취수장 침사지 준설 및 하수관부설 공사 시행중 물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 설계변경 사유가 발생하여 자체 심의위원회를 개최하고 심의결과를 보고드림

공사현황

공 사 명 : 풍납취수장 침사지 준설 및 하수관부설 공사

공사개요

- 준설 769㎥, 하수관부설 D=400mm, L=40m

도 급 액 : 금50,334,710원

사업기간 : 2016. 09. 28 ~ 2016. 12. 07

도 급 자 : 솔바로건설㈜ 대표자 한 훈 하

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 정수시설과장 유영춘

위    원 : 공업6급 양묘식외 3명, 간사 1명

일    시 : 2016.11.21(월) 15:00 ~ 16:00(2층 사무실)

안    건 : 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

심의위원회 심의내용

시공물량 증 ․ 감에 대한 적정성 검토

제경비 산출, 적용 적정성 검토

제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

변경 공사비                                           (단위:원)

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당초	변경
공급가액	45,758,828	28,830,000	감)16,928,828
부가가치세	4,575,882	2,883,000	감) 1,692,882
도 급 비	50,334,720	31,713,000	감)18,621,710

조치의견

위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경코자 합니다.

따로붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 심의 의견서 1부. 끝.