등록번호	교통행정과-69307		주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설국장
등록일자	2016.11.25.
			김광희		오성채		고영자		전결 11/25 이우룡
결재일자	2016.11.25.
공개구분	대시민공개
			협 조
2016년 보행자우선도로 조성사업 계획 취소
안전건설국 교통행정과

2016년 보행자우선도로 조성사업 계획 취소

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공사구간 : 약수동(약수시장 내 생활도로)

- 동호로7길 : 동호로7길 45 ~ 동호로7길 13

- 다산로8길 : 동호로7길 22 ~ 다산로8길 7

○ 공사내용

- 보행자 중심의 도로 조성을 위한 도막포장 공사

- 규    모 : 폭 8m, 연장  450m, 면적  3,600㎡

○ 주요 사업내용

- 보행자와 차량이 혼용하되, 노면 및 부속시설을 보행자의 안전과 편의를 우선적 고려 조성

- 단순 보도개선이 아닌 다양한 포장기법 적용 보행 안전성, 쾌적성 확보

○ 예    산 : 151,000천원(시비 79,000천원, 구비 72,000천원)

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2016. 01.11 : 사업 관련 자치구 공모(서울시 보행정책과)

○ 2016. 01.18 : 보행자 우선도로 조성사업 제출

○ 2016. 03.28 : 사업대상지 선정결과 통보(서울시 보행정책과)

○ 2016. 07.27 : 조성사업 기본 및 실시설계 용역시행

○ 2016. 09.07 : 사업구간내 주민 및 상인들 의견 수렴

Ⅲ		취 소 사 유

○ 상인요구

- 약수시장 내 보행자우선도로 조성 대신 불법주정차 방지 시설물 설치 요청

- 보행자의 안전을 위한 보·차도 구분 설치 요청

○ 우리구 검토 의견

- 상인들에게 본 사업에 대해 설계 원칙인 보차도 구분 없이 도로에 디자인을 반영하여 운전자들이 서행하도록 유도하는 것을 설명하였으나, 상인들이 지속적으로 보·차도 구분 요청

- 약수시장은 재래시장으로 보행자우선도로로 지정하는 것보다 재래시장 활성화를 위해 차량 통행을 감소할 수 있는 교통개선 방안 수립

Ⅳ		향 후 계 획

○ 보행자우선도로 대신 보행자 및 시장 방문객들이 안전하고 쾌적하게 보행할 수 있는 보행환경 개선 방안 검토

- 개선 방안 : 교통정온화 기법, 일방통행 지정, 보·차도 구분 등

○ 사업예산 반납.  끝.