더불어 사는 활기찬 희망성동
		성동구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(중랑천 횡단연결로 설치 기본 및 실시설계 용역)

우리 구에서 시행중에 있는 “중랑천 횡단연결로 설치 기본 및 실시설계 용역”에 대하여 다음과 같이 설계변경 하고자 합니다.

○ 용 역 명 : 중랑천 횡단연결로 설치 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : 2016. 3. 7. ～ 11. 30.

○ 계 약 사 : 대한민국상이군경회  대표 김덕남

○ 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 중랑천(성동구) 횡단연결로 설치 기본 및 실시설계. 시설비 및 부대비(시설비) - 시비

○ 변경내역

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
총용역비		126,681,000	120,410,000	감6,271,000
용역비	공급가액	109,710,000	109,463,636	감246,364
	부가가치세	10,971,000	10,946,364	감24,636
	계	120,681,000	120,410,000	감271,000
이 전 비		6,000,000	0	감6,000,000

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.

지방시설주사	김영일		하천관리팀장	박동규		치수과장	박상준		안전건설교통국장	11/25 代장완수
협조자	계약팀장	김종수		재무과장	김성철
시행	치수과-18405	(		)	접수		(		)
우	04750	서울특별시 성동구 고산자로 270	/	http://www.sd.go.kr
전화	02-2286-5816	/전송	02-2286-5937	/		/	대시민공개
궁금할 때, 불편할 때 국번없이 120으로!