함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고 [입상활성탄 재생시설 건설공사 기본 및 실시설계 용역]

1. 계획설계과-10048(2016.11.24)호와 관련입니다.

2. 『입상활성탄 재생시설 건설공사 기본 및 실시설계 용역』에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

가. 계 약 자 :*******************: 박승우외 1

나. 용역내용 : 입상활성탄 재생시설 건설 설계 용역시행과 경제성 검토

다. 계약기간 : 2016.05.02. ∼2016.12.10.

라. 변경계약 현황 : 물량 변경                        (단위 : 원)

구 분	당 초		변 경		비 고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
계약기간	‘16.05.02.∼ ’16.12.10.	563,200,000	변경없음	175,960,000	(감) 387,240,000

마. 변경사유 : 기본 및 실시설계에서 기본설계로 변경

※ 경제성 검토결과 장점이 없다고 하여 재생시설 건설추진 보류

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경계약 방침 보고서(본부장) 1부.

3. 설계 내역서 1부. 끝.

주무관	김경식		재무회계과장	박병식		요금관리부장	11/25 박병만
협조자
시행	재무회계과-16901	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(7)