문서번호	급수운영과-27526
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
손현정	이경희	11/25 代이경희
협 조

설계변경 심의결과 보고

(2016년 아리수 직결음수대 설치공사(인헌고등학교외 13개소))

2016. 11.

남부수도사업소

급수운영과

설계변경 심의결과 보고

(2016년 아리수 직결음수대 설치공사(인헌고등학교외 13개소))

우리사업소에서 시행중인 「2016년 아리수 직결음수대 설치공사(인헌고등학교외 13개소)」에 대하여 다음과 같이 자체 설계변경 심의를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 아리수 직결음수대 설치공사(인헌고등학교외 13개소)

○ 계약기간 : 2016. 8. 04. ~ 2016. 12. 01.

○ 계 약 자 : ㈜예성이엔지 대표 김 훈

○ 공사개요

구 분	당 초	변 경	증.감
공사개요	D=13~30㎜, L=1,210m	D=13~30㎜, L=1,734m	증)524m
계약금액	금86,642,500원	금95,200,000원	증)8,557,500원

□ 설계변경 심의위원회 개최 현황

○ 일    시 : 2016년 11월 25일(금) 16:00

○ 장    소 : 3층 급수운영과 회의실

○ 참석 인원 : 총 6인

- 위원장 급수운영과장, 심의위원 시설관리과 시설6급 고신석외 2명,

간사 급수운영과 시설6급 이경희, 업무담당자 시설9급 손현정

○ 심의내용 : 공종별 물량 증 ․ 감 및 신규공종 내역, 제비율 감액 등

□ 심의결과

○ 의결내용 : 본안통과

- 물량 증감 및 신규 공정 등에 대한 일위대가에 대한 검토 : 적정

- 내역서 및 제비율에 대한 검토 : 적정

□ 향후계획

○ 설계변경 심의위원회 심의결과에 따라 본안대로 설계변경 시행

붙임 : 1. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.