문서번호	시설보수과-9965
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		11/25 박병연
협조

〔외발산지하차도 정밀안전진단용역〕

설계변경 검토 보고(정산)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

시설보수과

- 외발산지하차도 정밀안전진단용역 -

설계변경 검토 보고(정산)

2016년도 예산사업으로 시행중인『외발산지하차도 정밀안전진단용역』   에 대한 설계변경(정산) 결과 보고임

Ⅰ		용역현황

용 역 명 : 외발산지하차도 정밀안전진단용역

용역기간 : 2016. 5. 4 ~ 11.29

용역개요 : 외발산지하차도 폭 20.1m, 연장 1,015m

계 약 사 : (재)한국건설품질연구원

도 급 액 : 128,670,000원

Ⅱ		설계변경 주요내용

주요내용

○ 자문회의비 미사용에 따른 변경

- 당초 10인, 1,500천원 → 변경 0인, 0원

공사비 변경 내역(증·감)                          (단위: 원)

구분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 용역비		128,670,000	127,170,000	감) 1,500,000
도급비	공급가액	115,609,091	115,609,091	-
	부가가치세	11,560,909	11,560,909	-
	계	127,170,000	127,170,000	-
이전비 및 기타 (자문회의)		1,500,000	0	감) 1,500,000

Ⅲ		조치의견

상기 보고 내용과 같이 설계변경(정산) 시행코자 함.

Ⅳ		향후계획

2016.11.28 : 변경계약

2016.11.29 : 준공처리

따로붙임 : 변경 내역서 1부.  끝.