문서번호	서울숲공원관리사무소-6160
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장
박선재	代박선재	11/28 윤학수

공사 실정보고사항 검토보고

(서울숲공원 제비서식처 조성공사)

2016. 11

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

공사 실정보고사항 검토보고

(서울숲공원 제비서식처 조성공사)

우리공원에서 시행 중인「서울숲공원 제비서식처 조성공사」추진중 시공사의 공사실정사항이 발생하여 아래와 같이 검토하고 공사에 반영코자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울숲공원 제비서식처 조성공사

❍ 공사기간 : 2016. 10. 28~ 11. 30

❍ 총공사비 : 금35,666,000원(도급액 : 금33,680,000원/관급자재1,986,000원)

❍ 공사개요

- 논습지조성 300㎡, 전기줄 설치 등

❍ 도 급 자 : ㈜청신종합조경 대표 손신자

Ⅱ		실정사항 보고

○ 주요 변경 내용

(단위 : 원)

구 분	현 안 사 항	조 치 계 획	비 고
순공사비	○ 현장여건에 따른 물량 변경	○ 식재공 증)2,751,845원 1) 사철나무(H1.5×W0.5) 식재 (당초0주→변경50주): 증)621,850원 2) 줄사철(L=1.0m) 식재 (당초0주→변경50본): 증)371,865원 3) 쥐똥나무(H1.5×W0.6) 식재 (당초0주→변경10주): 증)68,110원 4) 낙상홍(H1.5×W0.6) 식재 (당초0주→변경10주): 증)212,140원 5) 덜꿩나무(H1.5×W0.6)식재 (당초0주→변경20주): 증)766,760원 6) 오미자(L=1.5~2.0) 식재 (당초0주→변경20본): 증)329,700원 7) 산사나무(H2.0×R4)식재 (당초0주→변경5주): 증)381,420원	승인 증)2,752천원
	○ 현장여건에 따른 물량 변경	○ 부대공 1) 황토소 운반 (당초124㎥→변경60㎥): 감)2,794,824원	승인 감)2,794천원

Ⅲ		예산 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		소요 금액			비 고
		당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비		35,666,000	35,666,000	-
도급비	소 계	33,680,000	33,680,000	-
	공급가액	30,618,182	30,618,182	-
	부가세	3,061,818	3,061,818	-
관급자재비		1,986,000	1,986,000	-

Ⅳ		조치계획

○ 설계변경 시행→ 계약의뢰(공원운영과)

○ 제비 및 조류의 논습지 유인을 위한 수목 식재 등 현장여건에 따른 공사실정사항은 시급성을 감안하여 도급자로 하여금 우선시공하고 추후 도급금액 범위내에서 설계변경 코자 함.

붙  임 : 변경내역 1부.   끝.