투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	관급자재 납품수량 변경(증가) 요청-레미콘

1. 월드컵대교건설공사와 관련입니다

2. 우리부에서 시행중인『월드컵대교건설공사』관급자재(특수레미콘)에 대하여 아래와 같이 수량변경(증가) 및 납품기한 연기를 요청하오니 공사의 시급성을 감안 이른 시일내에 승인될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

□관급자재 변경내역

자재명	규격	단위	납품수량			납품기한		계약 번호	비고
			당초	변경	증가	당초	변경
레미콘 (특수)	19-45 -150	㎥	925	1,393	468	‘14.2.28	‘14.5.15	201303 148102

.끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	건설총괄부장,서 울 특 별 시 장(재무과장)
주무관	김성권		토목총괄과장	김영수		토목부장	03/17 노우성
협조자	주무관	최진우
시행	토목부-4992	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사2동 3층(도시기반시설본부 토목부)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2547	/전송	02-3708-2599	/	sssggk@seoul.go.kr	/	대시민공개