투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 교통신호기 설치 및 개량공사(연간단가)(강서, 영등포일부) 4차 작업지시 공사기간 연장(2회) 승인 통보

1. 대영유비텍 대영GE16A-11-21(2016.11.23)호와 관련입니다.

2.「2016년 교통신호기 설치 및 개량공사(연간단가)(강서, 영등포일부)」와 관련하여, 작업지시 4차 작업기간 연장 실정보고에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인 통보하오니 작업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고사항 승인 (작업지시 4차)

1) 4차 작업지시 장소 및 작업내용

연번	공사장소	지시사항	검토의견	비고
1	영등포구 영등포동 3가 29외 18개소	교통운영과-1477(2016.1.25.)외 노후제어기 및 노후지주 교체공사	- 강서구 보도 굴착복구 승인지연 당초 : 관리청복구 변경 : 원인자 복구 - 영등포구 관내 노후지주 교체구간중 광자가망 이전설치 협의지연

2) 실정보고 승인사항

가) 작업기간 연장

- 당  초 : 2016.08.11. ~ 2016. 11. 30.

- 변  경 : 2016.08.11. ~ 2016. 12. 20.(20일 연장)

- 연장사유 : 보도 굴착복구 승인 협의지연(관리청 복구→원인자복구)에 따른 절대공기 부족(기초공사 완료후 D/B 발급 14일). 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)성지수전,대영유비텍(주)
주무관	최승호		기전과장	11/28 박재경
협조자
시행	기전과-15531	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소	/
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/	viento01@seoul.go.kr	/	대시민공개