문서번호	시설보수과-6759
결재일자	2016.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정재형		윤승범	11/28 代한병연
협조

토목시설물 유지보수공사(연간단가) 설계변경(정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

중랑물재생센터

(시설보수과)

설계변경(정산) 보고

“토목시설물 유지보수공사(연간단가)”에 대하여 아래와 같이 계약 물량 증·감 사항이 발생하여 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

공사 현황

❍ 공 사 명 : 토목시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 공 사 비 : 174,804천원

❍ 공사기간 : 2016. 03. 25 ～ 2016. 12. 31

❍ 시 공 사 : ㈜정상엔지니어링 대표 최병조

보고내용

❍ 설계변경 사유 : 관리과, 운영과 요청사항 등 계약물량 증·감 사항 반영

❍ 주요공종 변경 내용

구 분	공 종	규 격	단위	당초	변경	증·감	비 고
시설물 보수	1. 토공
	무근콘크리트헐기	소형브레이커+공기압	㎥	20	133	증
	2. 구조물공
	레미콘타설	무근	㎥	0	62	증
	보차도경계석	200×250×1000cm	m	0	426	증
	도로측구	레미콘 B=30cm	m	100	426	증
	사고석포장	100×100×100cm	㎡	0	43	증
	3. 보수공
	콘크리트균열보수	건식,B=0.3㎜,t=100㎜	m	100	1,029	증

설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 공 사 비		174,804,100	199,866,000	증)25,061,900	신규공종은 낙찰률 적용 및 보험료 정산
도급비	공급가액	158,912,819	181,696,364	증)22,783,545
	부가가치세	15,891,281	18,169,636	증) 2,278,355
	계	174,804,100	199,866,000	증)25,061,900

조치내용

❍ 위와 같이 계약물량 변동사항을 반영, 설계변경 및 변경계약 하고자 합니다.

행정사항

❍ 설계변경 시행 및 변경계약의뢰(시설보수과 ⇨ 관리과)

❍ 변경계약 이후 준공검사 실시 및 준공 처리

붙임. 1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 사유서 1부. 끝.