문서번호	기전과-14944
결재일자	2016.11.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

	시 민
★주무관	기전과장
박태준	11/28 최태용

교통안전시설 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 (지하철 9호선 920공구 934정거장 및 환기구 공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통안전시설 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

지하철 9호선 920공구 934정거장 및 환기구 공사 관련 교통신호기 설치공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 지하철 9호선 920공구 934 정거장 및 환기구 공사 관련 교통신호기 설치공사

○ 공사위치 : 934정거장(방이사거리,방이중학교), 934환기구(올림픽공원 남4문사거리)

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2018.12.31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	설 계	감 리	시 공	원인자
신 호	㈜동림티엔에스	㈜건영이앤씨	미래월드안전㈜	도시기반시설본부 (도시철도토목부)

검토내용

○ 규제심의 : 서울특별시지방경찰청 교통관리과-040332(2010.11.25.)

- 공사에 따른 횡단보도 및 신호기(차/보) 임시 이설, 기타 차로 재구획 및 노면

표시, 교통안전표지 설치

※ 단계별 공사개요 및 교통안전시설물 개선내용(934 정거장) - 붙임문서(규제 공문) 참조

○ 변경사항 : 3단계 건설공사 기본계획 변경에 따른 준공일 연기요청

- 내 용

구 분	당초 준공일	연기 요청일	연기 사유	비 고
신 호	~ 2016.12.31	~ 2018.12.31	※ 3단계 건설공사 기본계획 변경에 따른 준공일 연기요청

○ 승인조건

	승인조건내용
- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음 - 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여야 하며, 변경사항(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함 - 교통신호제어기 신설시 통신(전송)선을 설치하여야 하며, 인근 제어기(200m이내)와 연동여부 협의(서울특별시지방경찰청 신호운영실) 후 설치 - 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등,가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과 신호 점검구는 별도 분리 설치 - 교통신호제어기는 2010년형 개발자검사(호환성 검사포함) 완료한 제품 설치 및 개선된 잠금 장치(자동닫힘) 설치 - 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치 - 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형)신설 - 교통신호제어기 인입전선, 통신(전송)선 및 신호케이블은 지중화 시공하여야 하며, 신호선 포설시 접속부위 없이(선로접속 불가) 포설하여야 함 - 지중 케이블 공사 시 횡단굴착 구간은 스틸파이프(후강 전선관) 시공 - 교통신호기공사 업무처리 가이드 라인 및 원인자 준수사항 이행 철저 - 교통신호기 주요자재(제어기,교통신호등 등)는 제작일로부터 3개월 이내의 자재 사용 - 공사시행중 DB 신청 및 변경시, DB를 수령 및 입력 후 DB인수인계증』,『교통신호 운영 정상 확인서』 및 『온라인 리포트』제출 - 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견

도시기반시설본부(도시철도토목부)에서 시행하는 지하철 9호선 920공구 934 정거장 및 환기구 공사 관련 교통신호기 설치공사 준공일 변경승인 요청에 대하여 현장확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리 하고자 합니다.

붙임 : 1. 공사중 교통처리계획 승인 통보(하달) 1부.

2. 서울도시철도 9호선 기본계획 변경승인 알림 1부.

3. 설계내역서(물량표) 1부.

4. 설계도면 1부.  끝.