문서번호	토목부-24431
결재일자	2016.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	터널건설과장	토목부장		시설국장
이정원	권혁대	김영수		11/28 형태경
협 조

응봉교(접속교량) 외부 전문가 점검계획

2016. 11.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

응봉교(접속교량) 외부 전문가 점검계획

응봉교 접속교량(L=407m)은 상·하행선 분리구조로 죠인트 부분 아스팔트 포장 상태에 대한 외부 전문가 점검 계획 검토보고 임

*‘16.11.25. 서울시의회 시정 질문관련 : 접속교 중앙차선 아스팔트 균열(밀림) 지적

1		사업개요

❍ 위  치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동1가(삼표레미콘앞)

❍ 규  모 ┏ 교량확장 : 폭4차로 → 6차로, 연장 625m

┗ 성능개선 : DB18  → DB24

❍ 기  간 : 2008. 10. 20 ~ 2016. 9. 20

❍ 사업비 : 87,814백만원[도급비 : 55,454백만원]

❍ 감리사 : (주)건화 외1         ❍ 시공사 : 한신공영(주) 외1

❍ 공  정 : 100%

2		추진현황

❍ ’08.10.       : 공사계약 및 착공

❍ ’14.12.       : 단계별로 가설교량 설치 및 기존교량 철거

❍ ’15. 6. 23. : 철도 횡단구간 교량 철거 및 재설치 공사

❍ ’15. 8. 29. : 아스팔트 포장(T=8㎝)

❍ ’15. 8. 31.  : 임시 개통(4차로)

❍ ’15. 7.∼10. : 터널형 방음벽 설치

❍ ’15.11.  2.  : 개통(6차로)

❍ ’16. 4. 12.  : 인수 전 사전 점검 결과조치 통보(교량안전과 → 토목부)

- 교량점검시설 미 설치, 신축이음장치 하부누수 발생 등

❍ ’16. 6.17. : 사업예산 확보 요청  (토목부 → 도로계획과)

- ’16 예산 반영(안) : 1,176백만원

(단위 : 백만원)

교량점검시설	죠인트 설치	조류방지시설	감리비
805	147	171	50

❍ ’16. 9. 20. : 공사 준공(9차)

3		현황 및 문제점

❍ 응봉교 본선 교량 총 연장 632m 중

- 아치교량(L=225m)은 상․하행선 일체구조

- 접속교량(L=407m)은 상․하행선 분리구조

1

2

3

「현 황 도」

「아치교 및 접속교량 단면도」

아치교량(225m) : 상․하행선 일체	접속교량(407m) : 상․하행선 분리 (20mm이격)

❍ 실시설계(‘08. 2.)시 죠인트 설치 미 반영되어 아스팔트 포장(T=8㎝)

❍ 인수 전 (‘16. 4.12) 사전 점검 시 죠인트 미 설치시 누수 발생우려

상,하행선 분리구간 누수 예상	상,하행선 분리구간 누수 예상

4		점검개요

❍ 점검일자 : 2016. 11 .30.(수)

❍ 점 검 자 : 8명

- 외부전문가 : ㈜한국구조물안전연구원 이채규

㈜한국재난연구원 이호영

- 토목부, 교량안전과(담당과장 및 담당자), 감리단, 시공사

❍ 점검내용

- 죠인트 아스팔트 균열 원인

- 분리구조 교량 구조적 안정성 여부

- 죠인트 아스팔트 균열 처리방안

5		향후 계획

❍ 외부 전문가 합동점검 결과후 정비방안 수립.  끝.