문서번호	치수과-16865
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장
이은주	유연춘	송기민	11/28 박형중
협 조
	예산담당			고영용

사업예산 활용계획 보고

(관내 1구역 하수시설물 보수공사 )

2016. 11.

안전건설교통국

( 치 수 과 )

사업예산 활용계획 보고

- 관내 1구역 하수시설물 보수공사 -

관내 노후 및 파손된 하수시설물 정비 등 주민생활 불편 및 민원사항 처리에 기 확보된 『관내 1구역 하수시설물 보수공사』 예산을 거의 소진하여 향후 발생하는 도로 동공이나 하수시설물 긴급 정비요청 등 민원처리에 소요되는 공사비에 대해 추경예산 및 낙찰차액을 활용하여 시행하고자 함.

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 2016년 관내 1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2016.02.17.~11.30.

○ 총공사비 : 880,029천원

○ 도 급 자 : ㈜미즈맘랜드스타 대표 조은희

○ 내    용

- 하수관 부설 : D=250～1,200㎜, L=675m

- 빗물받이, 횡단하수거 설치 : 180개소

- 맨홀(1~3호) 설치 : 36개소

Ⅱ		추진경위

○ 2016.01.22. : 공사 발주

○ 2016.02.17. : 공사 착공

○ 2016.03.~11. : 제1차~제7차 작업지시

○ 2016.09.28. : 제1회 설계변경

○ 2016.09.19. : 2015년 제1회 추가경정 예산 확정

○ 2016.11.30. : 시설공사 준공예정

Ⅲ		사업예산 집행현황

○ 사업예산 집행내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	총공사비	집행액	집행잔액	낙찰차액	비 고
하수 시설물	750,000	687,159	673,410	13,749	62,841	구비
지선하수관로	80,000	80,000	80,000	-	-	시보조금
빗물유입시설 확충 및 이설	40,000	40,000	40,000	-	-	시비
주민참여	10,000	10,000	10,000	-	-	구비
계	880,000	817,159	803,410	13,749	62,841

Ⅳ		보고내용

○ 도로동공 및 노후 하수시설물 정비 관련 민원이 지속적으로 빈번히 발생되고 있는 실정이나 『2016년 관내 1구역 하수시설물 보수공사 (연간단가)』의 공사비를 거의 집행(공정률:98%)하여 예산부족으로 민원처리가 지연되고 있음.

○ 향후 발생되는 도로동공 등 긴급보수 건이나 하수시설물 주민불편 민원사항 처리를 위해 추가로 소요되는 공사비는 낙찰차액(62,841천원) 및 추경예산액 (50,000천원)을 활용 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

○ 하수시설물 보수공사의 추경예산에 대해 신규 발주시에는 정비공사가 지연 되어 주민생활 불편이 가중될 뿐 만아니라, 2016 회계연도 출납폐쇄 기한이 12월말이므로 절대공기 부족하여 기 계약된  『2016년 관내 1구역 하수시설물 보수공사』에 포함하여 시행하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅴ		조치의견

○ 상기 사항에 대하여 우리구와 기 계약되어 추진중에 있는 『관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)』 계약업체에 작업지시하여 정비시행하고 추후 설계변경에 반영하여 정산처리 하고자 함.  끝.