함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(전체분 3회, 3차분 1회)

우리 본부에서 시행 중인 『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사(장기계속공사)

나. 공사개요 : 관로부설 D=1,500㎜, L=1,511m, 쉴드TBM D=2,200㎜, L=1,426m

다. 공사기간 : 2011.09.08 ~ 2014.04.05(전체분)

2013.01.01 ~ 2014.03.20(3차분)

라. 도 급 액 : 전체분 15,464,000,000원(3차분 5,700,000,000원)

마. 예산과목 : 구축물(송․배수관정비),시설비 및 부대비(시설비)

바. 계 약 자 : 중흥건설㈜ 대표 이길호 외 1개사

사. 설계변경 시행내역

1) 전체분 (제3회)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증∙감
공급가액	14,058,181,819	14,062,624,546	증 4,442,727
부가가치세	1,405,818,181	1,406,262,454	증 444,273
도급액	15,464,000,000	15,468,887,000	증 4,887,000

2) 3차분 (제1회)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증∙감
공급가액	5,181,818,182	5,181,818,182	-
부가가치세	518,181,818	518,181,818	-
도 급 액	5,700,000,000	5,700,000,000	-

아. 설계변경 사유(내역)

변 경 내 용	공사비(천원)	비고
○ 건설오니 설계수량 당초 이토발생량의 10%를 15%로 변경	-17,546
○ 터널 뒷채움 가소상그라우팅 공법 변경	-1,000
○ 용접가스 배기를 위한 정자관 설치	3,919
○ 도달기지 진․출입로 조롱박터널 철거 및 복구	41,000
○ 도달기지 기설치된 가시설 설치비 삭제	-17,850
○ 부력방지 시설 자재 및 설치 간격 변경	14,317
○ 도달기지 배기 팬 용량 부족으로 환기시설 추가 설치	10,574
○ 쉴드TBM 암별 굴진 연장 변경에 따른 감액	-3,017
○ 세그먼트 볼트박스 몰탈 주입량 누락분 반영	8,590
○ 몰탈 채움 확인용 CCTV 설치	5,172
○ 강관운반을 위한 세그먼트홈 몰탈채움비 반영	6,467
○ 몰탈 타설 실 수량 정산	-6,936
○ 안전관리비 정산	-2,700
○ 보링공 정산	-9,214
○ 도달 갱구공 정산	-4,629
○ 기타 실시공 물량 정산 및 제경비 정산	-22,260
합계	4,887

붙 임 :  1. 설계변경 설명서 (전체 3회, 3차 1회). 각 1부

2. 설계변경 보고서 각 1부.

3. 변경내역서 및 예정공정표(전체분 3회) 1부.

4. 변경내역서 및 예정공정표(3차분 1회) 1부.

5. 제비율 검증결과서 각 1부.

6. 설계변경도서 제출(감리단) 1부. 끝.

주무관	라승보		고도정수반장	이임섭		시설안전부장	전결 03/17 代강신재
협조자	주무관	백승운		주무관	김종필		재무회계과장	채규평
시행	고도정수반-66	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1456	/전송	3146-1529	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개