투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(가족자연체험시설 조성공사-함평)

1. 시설과-5208(2016.11.28)호의 관련입니다.

2.「2016 가족자연체험시설 조성공사(함평 성남초교)」와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2016 가족자연체험시설 조성공사(함평 성남초교)

나. 공사기간 : 2016.10.06 ~ 2016.12.04

다. 도 급 액 : ￦414,174,000원

라. 도 급 자 : 대한건설 주식회사 대표 노영삼

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2016. 10. 06. ~ 2016. 12. 04.

- 변 경 : 2016. 10. 06. ~ 2016. 12. 12.

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임  1. 준공기한연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

3. 시공사 공문 1부.

4. 계약기간 연장 합의각서 1부. 끝.

	시설과장
★주무관	김영균		시설팀장	임록화		시설과장	11/28 진병규
협조자
시행	시설과-6704	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화		/전송	02-2181-1169	/		/	대시민공개