투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	제1회 설계변경 시행(소화조 및 농축조 퇴적물 제거용역)

우리센터에서 시행하고 있는 “소화조 및 농축조 퇴적물 제거용역”에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회, 정산)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 소화조 및 농축조 퇴적물 제거용역

나. 용역기간 : 2016. 6. 09 ~ 2016. 11. 30

다. 도 급 자 : 삼현건설(주) 대표 윤정채

라. 변경사유 : 현장 실정에 따른 퇴적물 제거 물량 정산

마. 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영관리, 공통분야유

지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(54,330,000원)

물재생시설운영, 난지물재생센터운영, 공공운영비(113,057,000원)

바. 용 역 비

(단위 : 원)

구분	당초금액	변경금액	증‧감	비고
총용역비	113,057,000	167,387,000	증 54,330,000

첨부 1) 설계변경(정산) 내역서 1부.

2) 관련 보고서 1부.

3) 퇴적물 제거량 집계표 1부. 끝.

시설팀장							김재봉				시설보수과장					代김재봉					난지물재생센터소장					11/28 정흥순
협조자				주무관							홍징의					주무관							황재상					관리과장								윤석경
시행			시설보수과-3991										(						)		접수												(						)
우	10542					경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)																/
전화		02-300-8590							/전송			02-300-8587					/														/	대시민공개