투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	클라우드센터 2차이전 일정 변경에 따른 업무 협조 요청

1.『클라우드센터 1단계 이전‧이관 계획』(정보자원운영과-3846, ’16.11.7.) 및 클라우드센터 이전 이관에 따른 업무 협조 요청(정보자원운영과-3896, ’16.11.10.) 관련입니다.

2. 클라우드센터 이전과 관련, 촛불 집회 등 교통 혼잡 영향으로 인하여 모의훈련일과 이전일을 다음과 같이 변경하고자 하오니 서비스 중단에 따른 안내 및 홍보, 기술지원 등 원활한 서비스 재가동을 위해 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 이전대상 : 역사박물관홈페이지(서울역사박물관), 세무종합 및 세외수입 DR(세무과)

나. 추진일정

구분	변경전	변경후	서비스 및 원격지복제 중단시간
모의훈련	’16.12.3.(토) 17:00 ~ 익일 11:50(18시간 50분)	’16.12.2.(금) 17:00 ~ 익일 11:50(18시간 50분)	-역사박물관:(금)20:00~ 익일 10:55(14시간 55분) -백업센터 : (금) 18:00~익일12:40(18시간 40분)
이전	’16.12.17.(토) 17:00 ~ 익일 11:50(18시간 50분)	’16.12.16.(금) 17:00 ~ 익일 15:05(22시간 05분)

- 시간 증가 사유 : 역사박물관은 금요일 일정으로 인하여 20:00에 시작, 1차 이전·이관 시간을 감안하여 서비스 확인 및 기동 시간은  여유 있게 변경 처리함. 백업센터는 기동테스트를 DAUS 툴로 테스트하는 시간 추가함.

다. 협조요청사항 (세부내역 붙임 계획서 참조)

- 전산실 출입 및 회의실 제공

- IP 변경 등에 따른 사전 준비 작업 철저 이행

- 서비스 중단에 따른 안내 및 홍보

- 시스템 관련 담당자 및 유지보수 인력 작업 지원

- 반드시 이전/이후 시스템 환경 설정 확인 및 서비스 테스트

※ 모의훈련 시에도 동일하게 업무 협조

붙임 : 1. 이전시나리오_작업계획및Timetable 1부.

2. 대상기관별 이전시나리오(세무과) 1부

3. 대상기관별 이전시나리오(역사박물관) 1부.

4. 클라우드센터 1단계 이전·이관계획 1부.  끝.

	서울특별시데이터센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(세무과장),서울역사박물관장(시설과장)
주무관	박종순		정보자원운영과장	김영숙		데이터센터소장	11/29 代김안철
협조자	주무관	김진석		인터넷통신과장	황기원
시행	정보자원운영과-4161	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 49	/	www.seoul.go.kr
전화	3470-1441	/전송	3470-1449	/	jspark@seoul.go.kr	/	부분공개(2)