문서번호	정수시설과-9057
결재일자	2016.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김우승		이흥수	11/29 차윤기
협 조
	주무관			이해승

천만 시민과 함께 하는 맛있는 아리수!

2016년 관내노후건축시설물 보수공사

완료및 설계변경보고

2016. 11.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2016년 관내노후건축시설물보수공사 완료 및 설계변경 보고

우리 정수센터 『2016년 관내노후건축시설물보수공사』가 현장 시공상태 확인점검결과 설계도서와 같이 완료되어 설계변경하여 준공처리코자함.

Ⅰ				공사개요

공 사 명 : 관내 노후건축시설물 보수공사

공사기간 : 2016. 9. 01  ~ 12. 29

공사내용 : 표면처리(2,094㎡), 단면복구(26㎡), 균열보수(232m)

도 급 액 : 145,399,800원

계약업체 : 딥스이앤씨(주) 대표 이 상 호

Ⅱ				준공검사 결과

주요공사 현황

연번	공 종	단위	수 량			비 고
			계약	준공물량	증
1	표면보수	㎥	2,094	2,099	5
2	균열보수	m	232	232	-
3	강관비계	㎡	2,018	2,234	216

주요공종 시공사진

여과지 표면보수완료	여과지 단면복구완료	여과지 균열보수완료

공사 확인점검 결과

○ 점검대상 : 준공 물량

○ 점검일시 : 2016. 11. 25(금)

○ 점검방법 : 공종별 시공상태 전수점검

○ 점검내용

연번	점 검 위 치	공 사 내 용	준공수량	잔여	시공적정성
1	여과지	표면보수	2,099㎡	-	적 정
2	여과지	균열보수	232m	-

○ 입회확인자 : 지방시설서기보 박건수, 지방시설서기보 서한빈

○ 점 검 결 과 : 관내노후건축시설물보수공사 작업물량 시공상태 적정여부 확인결과                          설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

Ⅲ				조치의견

수량변경 및 제경비에 대한 설계변경하여 정산을 시행코자 함

공사현장에 대한 공종별 시공상태 점검결과 시공상태가 양호하다고 판단되어 준공 처리하고자 함.

Ⅳ				행정사항

설계변경계약

준공

붙 임 :  1. 현장점검 사진 1부

2. 관내노후건축시설물보수 현황사진 1부. 끝.