문서번호	설비부-18451
결재일자	2016.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	11/29 권오식
협 조

- 구리암사대교 건설 전기공사 -

예비 준공검사(5차분) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

	도시기반시설본부
	[설 비 부]

- 구리암사대교 건설 전기공사 -

예비 준공검사(5차분) 계획 보고

구리암사대교 건설 전기공사(5차)의 준공기한('16.12.31)이 도래함에 따라 관련근거에 의거 준공前 예비 준공검사를 다음과 같이 실시하여 공사 준공처리에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

□ 공사위치 : 구리시 아천동  ～  강동구 암사동

□ 공사규모 : 가로등 설치×604본, 경관조명 설치×1식

□ 공사기간 : 총차 10.07.28.~16.12.31.( 5차 15.12.30.~16.12.31.

□ 도 급 비 : 총차 금4,142,466,000원(5차 금72,593,000원)

□ 시 공 사 : 모범전설(주) 대표 오세창

□ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링

Ⅱ		관련근거

□ 책임감리 현장참여자 업무지침서(국토행양부 고시 제2012-542호,'12.08.21)

□ 제62조(예비준공검사)

□ 예비준공검사(5차분) 수행 계획 보고

□ 도화(감리)2016-264호('16.11.25)

- 공    사    명 : 구리암사대교 건설 전기공사(5차)

- 준공금액(5차) : 금72,593,000원

- 준공기한(5차) : 2016.12.31.

Ⅲ		예비준공검사 계획

□ 예비준공검사 일시 : 2016.11.30(수)

□ 예비준공검사 참여자

□ 검사자(소속직원 2명)

- 도시기반시설본부 설비부 열빛총괄과 성호준

- 도시기반시설본부 설비부 열빛총괄과 곽용길

□ 입회자(감리원 1명, 현장대리인 1명)

- 책임감리원(단장), 현장대리인(전기)

□ 예비준공검사 내용

□ 준공기한(5차) 내(內) 준공가능 여부 및 미진사항의 사전 점검 보완

□ 감리원이 확인한 정산설계도서, 점검표 등에 의거 검사(지적사항 작성)

□ 예비준공검사 실시결과 조치계획

□ 예비준공검사 실시결과 지적사항에 대하여는 감리원에게 보완지시

□ 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완하고 책임감리원의 확인 후 준공검사원 제출

Ⅳ		향후 계획

□ 2016.11.30일 : 예비준공검사(5차분) 실시

□ 2016.12.31일 까지 : 준공처리(5차분) 완료

따로붙임 : 예비준공검사 현장점검표 1부. 끝.