문서번호	정보공개정책과-22928
결재일자	2016.11.11.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

			시 민
주무관		정보소통혁신팀장	정보공개정책과장
송정아		송희자	11/11 조영삼
협조
	주무관		김우성

정보소통광장 서비스 고도화 및 문서공개시스템 기능 확대 사업 부분준공검수(사) 보고

2016. 11.

정보공개정책과

정보소통광장 서비스 고도화 및 문서공개시스템 기능 확대 사업

부분준공검수(사) 보고

정보소통광장 ISP 수립 및 홈페이지 리뉴얼 오픈에 따라 「정보소통광장 서비스 고도화 및 문서공개시스템 기능 확대」 에 대해 부분준공검수(사)를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 추진근거

❍ 검사원지정요구(부분준공)(재무과-54447, 2016.11.4.)

❍ 정보소통광장 서비스 고도화 및 문서공개시스템 기능확대 사업 ISP완료보고 및 자문회의 결과보고(정보공개정책과-17140, 2016.8.23.)

❍ 정보소통광장 리뉴얼 오픈(2016.10.28.)

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 정보소통광장 서비스 고도화 및 문서공개시스템 기능 확대

❍ 사업기간 : 2016. 2. 11 ~ 2016. 12. 31

❍ 계약금액 : 1,052,400천원

❍ 계 약 자 : (주)피씨엔

❍ 계약방법 : 수의계약   (※2회 유찰에 따라 수의계약)

❍ 사업범위

- 공개서비스 및 콘텐츠 품질 진단, 타 서비스 사례 및 이용행태 분석

- 효율적인 사업추진을 위한 연도별(3개년) 실행계획 수립

- 정보공개 실효성 확대를 위한 개인별 맞춤형 및 전문가 서비스 제공

- 시민 눈높이에 맞는 콘텐츠 발굴 및 시각화 시범 서비스 추진

- 다양한 행정정보가 활발히 공유될 수 있는 유통허브 기반 조성

- 행정정보의 안전한 공개를 위한 종합적인 모니터링 체계 구축

- 정보공개 서비스 품질 혁신을 위한 데이터 및 시스템 기반 구축

- 행정정보의 원활한 공개를 위한 연계 및 운영관리 체계 개선

- 행정정보 공개서비스 확대에 따른 인프라 보강(H/W, S/W 등)

- 정보소통광장, 문서공개시스템의 안정적 운영 및 유지관리

□ 부분준공 내용

❍ 부분준공일자 : 2016. 10. 31.

❍ 부분준공금액 : 783,237천원

❍ 부분준공 내역

- 용역인력 투입 : ************************** 투입

(단위:M/M)

월 구분		‘16.02	‘16.03	‘16.04		‘16.05	‘16.06	‘16.07		‘16.08	‘16.09	‘16.10	‘16.11	‘16.12
프로세스		정보화전략계획(ISP)							구현/시험				안정화
		분석			설계
투입MM	**********	***	***	****		****	****	****		**	****	****	****	***
누적투입MM	**********	***	****	****		****	****	****		****	*****	*****	*****	*****
인력투입율	100%	3.9%	10.5%	19.2%		29.1%	38.4%	47.2%		59.3%	71.6%	83.4%	93.1%	100%

- 전체 공정율의 80% 추진 [분석(15%) + 설계(20%) + 구현/시험(45%)]

▸정보공개 서비스 개선을 위한 정보전략계획(ISP) 수립 완료

▸과업내용 분석, 기능개선을 위한 화면 및 기능 설계

▸정보소통광장·문서공개시스템에 대한 기능개선을 통한 맞춤형 서비스 등 1차 리뉴얼 오픈(‘16.10.28) 실시

□ 검수(사) 내용

❍ 검수기간 : 2016. 11. 4(금) ~ 11. 9(수), 4일간

❍ 검 수 자 : 전산6급 송정아, 전산7급 김우성

❍ 검수내용

검사내역	증빙자료	확인 결과	비고
- 용역인력 투입현황	2~10월 월별투입내역	○	[붙임1]
- 정보전략계획(ISP) 수립	완료보고서	○	[붙임2]
- 분석, 설계 및 구현 실적	산출물 목록	○	[붙임3]
- 맞춤형 서비스 등 리뉴얼 실적	리뉴얼보고 (10월 월간보고)	○	[붙임4]

- 기타사항

▸ISP결과보고서는 준공시 인쇄본으로 납품 예정(100부)

▸공정율 80%에 해당하는 산출물에 대해 “정보화사업관리시스템”에 등록 조치토록하고, 해당 산출물 검수함

□ 사업비 집행

구분	집행일자	금액(천원)	집행율	비고
계약금액	2016. 2.11	1,052,400
선금액	2016. 4. 5	420,960	40.0%
부분준공액	2016.11월중	783,237	74.4%	실 지급액은 선금을 제외한 362,277천원임
집행잔액	2016.12월중	269,163	100.0%

□ 향후일정

❍ 부분준공처리 결과 재무과 송부 : ‘16. 11. 11까지

❍ 외국어 서비스 등 2차 리뉴얼 오픈 준비 : ‘16. 11. 30까지

❍ 잔여 과업에 대해 차질없이 진행될 수 있도록 사업관리 철저 : ‘16.12.31까지

붙임 :  1. 용역인력 투입내역(2~10월) 1부.

2. ISP 완료 보고 1부.

3. 산출물 목록 1부.

4. 리뉴얼 보고서 1부.   끝.