문서번호	방재시설부-18851
결재일자	2016.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
고소영		김인숙	11/29 임춘근
협조

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

식재포트 변경 제작 실정보고 검토보고

2016.11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

식재포트 변경 제작 실정보고 검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」식재포트 변경 제작과 관련 실정보고에 대한 검토 보고임. 【관련근거 : 서울역(건)제16-411호(2016.11.23.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문 5가 ~ 만리동 1가 62

○ 시 공 사 : 홍익건설산업(주), ㈜동원개발

○ 도 급 비 : 1,963,173,000원(조경 : 4,948,900,000원)

○ 공사기간 : 2016.04.18. ~ 2017.05.17.

□ 보고내용

○ 식재포트 제작 방법 및 수량 변경

- 제작방법 변경

변경전 : 블록조명, 일체형제작	변경후 : 띠조명, 경사적용, 분리형제작

- 수량 변경

공 종	당 초			변 경			비 고
	규 격	단위	수 량	규 격	단 위	수 량
식재 포트	69 Type	개	601	63 Type	개	554	시험제품 3개
FRP 몰드			-	3 Type	개	3	시험제작용 3개

- 변경사유 : 식재수목 생육공간 확보를 위해 식재포트 규격을 일부 상향 조정하고, 식재포트에 부착되는 조명방식이 블록형에서 띠형으로, 경사에 맞추어 적용토록 변경됨에 따라 식재포트를 상부, 하부로 분리하여 제작하게 되어 포트의 생산단가 상승 및 수량증감에 따른 변경과, 조명기기 부착 시험용 포트 견본 제작비가 추가 발생함.

○ 공사비 증감내용

공 종	변경전			변경후			증 감	비 고
	수량	단가	금 액(원)	수량	단가	금 액(원)
식재 포트
식재 포트 자재비			1,445,699,390			1,785,760,445	+) 340,061,055	견적
시험제작 및 시공			29,341,655			25,191,031	-) 4,150,624	〃
직접공사비			1,475,041,045			1,810,951,476	+) 335,910,431
제경비			245,740,774			301,048,524	+) 55,307,750
공급가액			1,720,781,819			2,112,000,000	+) 391,218,181
부가가치세			172,078,181			211,200,000	+) 39,121,819
도급 공사비			1,892,860,000			2,323,200,000	+) 430,340,000

○ 단가 및 수량 산정기준

- 실시설계 도서 적용

- 관련근거 : 토목부-22440(2016.11.2.) 서울역 7017프로젝트 기본 및 실시

설계 도서 송부

○ 신규단가 적용

- 강제협의율 적용 : 90.014% <(낙찰율 80.027% + 설계가 100%)*1/2>

- 관련근거 : 방재시설부-17936(2016.11.15.) 협의율 조정회의 결과 알림

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 서울역 7017 프로젝트 건설공사 중 조경공종에 식재포트의 제작 방식과 수량 변경에 따른 실정보고를 검토한 결과 설계자의 요청으로 식재 포트에 밴드형 조명기를 부착함에 따라 일체형 포트가 상,하부로 분리 생산 하는 것이 불가피하여 포트 수량은 감소하였으나 제작비가 상승되고, 조명기  부착 시현을 위한 시험 제작이 타당한 것으로 판단되어 실정 보고하고 추후 설계변경에 반영 하고자함.

□ 보고자 의견

○ 식재포트 제작방식 및 수량변경에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고 향후 설계변경 시 정산 반영 조치하고자 함

붙 임  건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.