투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	지정폐기물(폐석면)처리용역 준공기한 연기 의뢰(율곡로)

1. 우리 본부에서 시행 중인‘율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사 지정폐기물(폐석면)처리용역’에 대해 다음과 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사 지정폐기물(폐석면)처리용역

나. 계 약 자 : ㈜새움 대표 박인자

다. 계약금액 : 2,200,000원

라. 계약기간 : 2016.04.05.∼ 2016.12.31.

마. 준공기한 연기 : 2016.12.31. ⇒ 2017.06.30.

※ 계약금액 변경없음

바. 연기사유 : 보상협의 지연에 따른 지정폐기물(폐석면)처리용역 기간 연장

붙임 : 1) 준공기한연기의뢰서 1 부.

2) 감리 검토의견서 1 부.

3) 계약기간 연장 합의각서 1 부.  끝.

	토목부장
주무관	한병찬		광역도로과장	진재섭		토목부장	11/29 김영수
협조자
시행	토목부-24516	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2557	/전송	02-3708-2599	/	bchan1005@seoul.go.kr	/	부분공개(5)