문서번호	시설보수과-10084
결재일자	2016.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		11/30 박병연
협 조

-2016년 도로시설물 일상유지보수공사-

작업지시 실정보고

2016. 11.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

-2016년 도로시설물 일상유지보수공사-

작업지시 실정보고

2016년도 사업으로 시행중에 있는『2016년 도로시설물 일상유지보수공사』와 관련 『제14차 작업지시』중 물량 변경에 따른 실정 보고임

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 2016년 도로시설물 일상유지보수공사(강서)

❍ 공사규모 : 포장보수 95a, 신축이음보수 80m, 도장보수 1,600㎡ 등

❍ 공사기간 : 2016. 4. 8 ~ 2016. 12. 31

❍ 도 급 자 : 백토건설(주) 대표자 이인수

❍ 도 급 비 : 1,923,822천원

❍ 공 종 율 : 95%

Ⅱ		주요 보고내용

□ 제14차 작업지시 중 오류철도고가 보행로 아스팔트 절삭후

덧씌우기 공정 제외

❍ 본 공사 제14차 작업지시내역중 오류철도고가 보행로상 체수발생 및  노면상태 불량에 따라 아스팔트 절삭후 덧씌우기 작업코자 하였으나, 관련기관(철도)과의 협의에 따른 장기간이 소요된 후, 작업시행시 동절기 기온 강하에 따른 품질관리 확보가 어려운 것으로 판단됨

- 작업물량 변경 내역

① 절삭후아스팔트 덧씌우기 물량 변경 : 감) 0a

▶ 당초 : 6.41a → 변경 : 0a

② 교면방수 물량 변경 : 감) 0㎡

▶ 당초 : 148.94㎡ → 변경 : 0㎡

➂ 주입줄눈공 물량 변경 : 감) 0m

▶ 당초 : 153.5m → 변경 : 0m

➃ 유공관설치(D=10mm) 물량 변경 : 감) 0m

▶ 당초 : 68m → 변경 : 0m

Ⅲ		검토결과

□ 상기 내용과 같이 작업지시 물량을 변경(지시)후 겨울철 품질관리 등

시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함

※ 개략공사비 : (감) 45백만원

Ⅳ		처리의견

❍ 위 검토결과에 따른 변경내용을 시공사에 통보하고 추후 설계변경시 정산처리코자 하며

❍ 본 공사에서 제외된 상기 물량은『2017년 도로시설물 일상유지 보수공사』 에 의거 작업 시행. 끝.