함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2016년 아리수 직결음수대 설치공사(인헌고등학교외 13개소))

1. 우리사업소에서 시행 중인 「2016년 아리수 직결음수대 설치공사(인헌고등학교외 13개소)」에 대하여 설계변경 사전심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 아리수 직결음수대 설치공사(인헌고등학교외 13개소)

나. 공사기간 : 2016. 08. 04. ~ 2016. 12. 01.

다. 계 약 자 : ㈜예성이엔지  대표 김 훈

라. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증감 및 신규공종 발생

마. 설계변경 내역                                              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	86,642,500	95,200,000	증)8,557,500

바. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비(음수대 설치사업)

붙임   1. 설계변경 보고서류 각 1부.

2. 합의서 및 설계변경 내역서 각 1부.  끝.

주무관	손현정		주무관	代서명신		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	최철민
남부수도사업소장	11/30 전영석
협조자	주무관	代한규수		행정지원과장	이두영
시행	급수운영과-27888	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4559	/전송	3146-4589	/		/	부분공개(7)