문서번호	설비부-18568
결재일자	2016.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 11/30 권오식
협 조

『장안교(구교) 성능개선 전기공사』

2016년 재배정 예산 집행 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『장안교(구교) 성능개선 전기공사』

2016년 재배정 예산 집행 계획 보고

「장안교(구교) 성능개선 전기공사」에 소요되는 2016년 재배정 예산의 불용 방지를 위한 집행 계획에 대해 검토 보고 드림.

□  공사 개요

공 사 명 : 장안교(구교) 성능개선 전기공사

규    모 : 장안교 가로등 및 교통신호등 설치 1식(B=17.6m, L=218m)

전기공사 현황

공 사 명	계 약 자	공사금액(원)		공사기간	비 고
장안교(구교) 성능개선 전기공사	대도전기(주)	총차	152,658,000	2015.10.12.~ 2016.12.15.	공사기간 연기 예정
		1차	90,310,000	2015.10.12.~ 2016.6.30	준 공 (2016.6.7.)
		2차	62,348,000	2016. 4. 29.~ 2016.12.15.	금 차

※ 공사기간 연장 예정(당초: ‘16.12.15.~변경: ‘17.08.31.)

□  2016년 재배정 예산 집행현황                (단위 : 원)

공 사 명	원인행위금액	현 지출액	지출잔액(불용액)
장안교(구교) 성능개선 전기공사	152,658,000	90,310,000	62,348,000

2016년 재배정 예산 집행전망 및 대책

‣집행전망: 장안교(구교) 성능개선 전기공사(2차) 계약금액 중 현재까지

지출하고 남은금액은 연도내 집행이 불가하여 불용예상.

‣대   책: 불용 예상금액에 대하여 감원인행위 후 관급자재 구매 및

연도내 집행 가능한 부서(토목부)에 재배정.

□ 예산사용 계획

부 서	예산액	배정액	배정 부서	사 유
설비부	62,348,000	43,737,220	설비부	관급자재 구매
		18,610,780	토목부	예산의 효율적 사용

‣ 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 일반교량관리,

장안교 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비.

□  보고자 의견

2016년 재배정 예산의 효율적 사용을 위하여 불용이 예상되는 금액을 감원인행위하여 관급자재(가로등주 및 등기구) 구매 및 연도내 집행이 가능한 부서에 재배정 하고자 함.

붙임  2016 회계연도 예산집행 현황(장안교 성능개선 전기공사) 1부.  끝.