문서번호	서울역일대종합발전기획단-4427
결재일자	2016.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	사업계획팀장	재생사업반장	서울역일대종합발전기획단장		안전총괄본부장
이유국	권완택	김길남	이충열		05/17 김준기
협 조

서울역 고가 주변 보행길 조성 기본계획

안전총괄본부

(서울역발전기획단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□	장애인 및 노약자 고려, 보행공간 조성
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

서울역 고가 주변 보행길 조성 기본계획

서울역고가 보행길과 연계하여 고가주변 보행 네트워크를 구축을 위한 기본구상 마련계획임

□ 추진방향

○ (기본 개념) 서울역고가 보행길이 개별 단위사업에서 벗어나 서울역고가 주변 생활권까지 확장하여 면(面) 단위의 보행길 정비

○ (스토리 텔링) 지역에 산재한 역사 및 문화적인 장소성을 살려 지역의 정체성을 유지하며 끊임없이 스토리를 생산하는 보행길 조성

○ (디자인 컨셉) 서울역 고가 주변 보행길 조성은 서울역 고가 보행길과 어울릴 수 있도록 당선자로 하여금 기본구상 마련

□ 추진경위

○ ’15.9.3/’16.1.14	소통전략회의시 서울역고가 주변도로 정비 시행

- 서울역 고가가 끝나는 지점과 연결되는 보도 정비방안 강구

○ ’16. 1.26	2016년 신년 업무보고 (시장)

- 서울역 고가 주변 보행길 빠른 시일내 사업 시행

○ ’16. 3.11	보행길 기본구상 등 주요 현안보고 (시장)

- 주변 보행길 기본구상은 당선자에게 맡겨 진행하고 가능한 조기 사업 완료

○ ’16. 3.12~5.2.	주변 보행길 기본구상 관련 MVRDV 협의 (4회)

○ ’16. 4. 7.	위니마스 보행길 답사 및 기본구상 보고 (시장)

- 주변 보행길 기본구상은 MVRDV에서 시행하고 6월까지 완료

○ ’16. 4.22.	서울역고가 주변 보행길 현장답사 및 회의 (부시장 주재)

- 주변 보행길 정비는 현장 여건에 맞게 하되 보행길 MP 선정·운영

□ 과업개요

○ 과 업 명 : 서울역고가 주변 보행길 조성 기본계획(안)

○ 과업기간 : 2개월 (’16. 5.~ 6.30)

○ 소요예산 : 약 112백만원 (VAT 포함)

○ 시행방안 :『서울역 7017 프로젝트 기본 및 실시설계』포함 시행

- 서울역 7017프로젝트 설계중인 MVRDV에서 과업수행

○ 과업목표

- 서울역 일대 보행길 마스터플랜(MasterPlan) 수립

- 서울역고가와 연결되는 생활권 보행로(3개소) 특화방안

- 설계 진행중인 보행로(퇴계로, 만리재로, 소월로, 중림로)에 대해 디자인 컨셉 및 의견 제시

	【MP선정 및 추진계획】
· 퇴계로 및 만리재로 : 김영준 대표(서울역 고가 보행길 조성 MP) · 중 림 로 : 김영욱 교수(서울역 일대 도시재생 활성화 방안 MP) · 그 외 생활권 보행길 : 각 보행길 MP를 자체 선정 추진

□ 주요 과업내용

○ 조사분석

- 서울역고가 주변 보행형태 및 보행 장애요인 분석

- 생활권별 주요 보행길 선정 / 보행로 주변 건축물 용도, 밀도 및 건축유형 분석

- 주요 보행로 역사 및 문화가치 분석 / 국내외 사례조사

○ 마스터 플랜

- 보행 마스터플랜 컨셉 제시 / 오픈 스페이스 전략

- 보행길 연결, 보행통로(Corridor), 지역 특화, 녹지 연결방안 등 제시

- 공공장소로서 특성 제시, 조경 / 가로(Street Furniture 포함) 계획

- 연도별 보행길 시행계획 제시

○ 생활도로(3개소) 차별화 전략

- 주요 보행로 차별화 전략 / 보행로 주변 건물 재생방안 제시

- 보행로 활성화를 위한 주민 참여방안 / 소규모 정원 및 공원 컨셉 제시

- 렌더링 이미지 5개소 제출

□ 향후계획(안)

○ ’16. 5월말	: 마스터 플랜 완료

○ ’16. 6월중순	: 생활권 보행로(3개소) 특화방안 완료 및 중간보고

○ ’16. 6월말	: 기본계획 과업 완료

○ ’16. 7월초	: 성과품 관련부서 통보(보행자전거과, 보도환경개선과, 공공재생과)

첨 부 : 1) 과업제안서(MVRDV).

2) 위 치 도(예시) 1부.  끝.