투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2016년 노후포장도로 노면표시 감리용역 준공기한 연기 의뢰

우리과에서 추진중인 「2016년 노후포장도로 노면표시 감리용역」준공기한을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 공 사 명 : 2016년 노후포장도로 감리용역

○ 계약금액 : 금9,251,000원

○ 용역기간 : 2016. 4. 25 ~ 2016. 11. 30

○ 용역규모 : 노면표시 감리용역 1식

○ 도급업체 : ㈜트래픽스  대표 김희수

○ 준공기한 연기사유

- 2016년 노후포장도로 정비구간내 노면표시 보수공사 준공기한 연기와 관련 감리 용역수행 연기

○ 준공기한 연기 : 당초 2016. 11. 30 → 변경 2016. 12. 30

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

- 귀책사유 : 성동도로사업소

	도로보수과장
주무관	홍수종		도로보수과장	11/30 이상호
협조자
시행	도로보수과-5954	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	대시민공개