문서번호	조경과-17013
결재일자	2016.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
조현		하재호	11/30 이원영
협조

“2016 생활주변 자투리땅 녹화사업”

예산 추가 재배정 요청에 대한 검토보고

2016. 11.

푸른도시국

(조 경 과)

“2016 생활주변 자투리땅 녹화”

예산 추가 재배정 요청에 대한 검토보고

“2016 생활주변 자투리땅 녹화사업”과 관련, 동작구 사당동 일대의 환토 및 사업규모 확대 등에 따라 예산의 추가 재배정을 요청한 건이 있어 검토하고 아래와 같이 조치하고자 함.

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 2개소

- 동작구 사당동 1112 일대, 사당동 1043-16

○ 규    모 : 90㎡

○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 10백만원

○ 사업내용 : 수목식재 등

□ 변경개요 및 요청사항

○ 변경내용

- 설계심의 결과 반영에 따라 답압 등으로 식재에 적합하지 않은 녹지내 토양에 대한 환토와 무단횡단 등 인위적 훼손을 예방하기 위한 사업규모 확대로 사업비 증액이 예상되어 이에 대한 예산 추가 재배정을 요청

- 사업규모 및 사업비 변경현황

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	90㎡	160㎡	증70㎡
사 업 비	10,000천원	16,500천원	증6,500㎡

○ 요청내용

- 사업규모 확대 및 사업비 증액 사항 승인 및 추가예산 재배정

□ 검토결과 : 승인

○ 본 건의 설계심의 시 주택가와 인접한 교통섬 등의 지속가능한 녹지조성을 위한 사항으로 요청사항 승인

○ 추가배정 요청액은 개략금액이므로 설계변경시 실제 물량에 따라 정산, 준공하도록 안내

□ 조치계획 : 예산 추가 재배정

○ 재배정 내역

(단위 : 천원)

자 치 구	총예산액	기배정액	잔 액	추가배정액	비고
동 작 구	10,000	10,000	0	6,500

○ 예산활용 : 2016 생활주변 자투리땅 녹화 배정잔액 활용

○ 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 생활주변 자투리땅 녹화, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙 임 : 관련 공문 일건.  끝.