문서번호	경제정책과-18399
결재일자	2016.11.30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	로봇과학관팀장	경제정책과장
한유리	김현준	11/30 김태희

(가칭)로봇과학관 건립 타당성조사 기술용역 준공기한 연기 검토 보고

2016. 11.

경제진흥본부

(경제정책과)

『(가칭)로봇과학관 건립 타당성조사』

기술용역 준공기한 연기 검토 보고

「(가칭)로봇과학관 건립 타당성조사」용역과 관련, 서울공공투자관리센터의 타당성검증이 의무화되어 타당성검증에 소요되는 기간만큼 용역 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : (가칭)로봇과학관 건립 타당성조사 용역

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰

○ 계약업체 : *********************
***********************

○ 용역기간 : 2016. 7. 27.~2016. 12. 26.

○ 계약금액 : 81,500천원(금팔천백오십만원정)

○ 과업내용 : 건립의 타당성과 사업의 적정성을 검토하고 과학관 건립

및 운영에 필요한 제반 기본 계획(안) 마련

Ⅱ		추진경위

○ 2015.10월       로봇박물관 건립 기본구상 계획(안) 시장방침 수립

○ 2015.10월       로봇박물관 건립 타당성조사 용역 시행계획 수립

○ 2016. 7월       로봇과학관 건립 타당성조사 용역 계약 체결

○ 2016. 7월       로봇과학관 건립 타당성조사 용역 착수보고회

○ 2016.10월       로봇과학관 건립 타당성조사 용역 중간보고회

Ⅲ		용역 변경사항

○ 변경사항 : 준공기한 연기(60일)

구분	당 초	변 경	증‧감
계약금액	81,500,000원	81,500,000원	변동없음
계약기간	’16. 7. 27 ~ ’16. 12. 26	’16. 7. 27 ∼ ’17. 2. 25	60일 연장

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시(지체상금 미부과)

○ 연기사유 : 서울공공투자관리센터의 타당성검증 수행 의무화에 따라 타당성검증에 소요되는 기간만큼 준공기한 연기

- ********************************************

‧ **********************************************************

- **************************************

Ⅳ		향후일정(안)

○ ’16. 12. 1. : 변경계약(계약기간 연장) 의뢰(⟶재무과)

○ ’16. 12. 5. ~ ’17. 2. 4.  : 서울시공공투자관리센터 타당성검증

○ ’17. 2. 5.  ~ ’17. 2. 25. : 타당성조사 용역 완료

붙임 : 합의각서 1부.  끝.