	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 통보 (2016년 도로교통소통 등 3건 교통안전표지 설치 공사)

1. 기전과-6259(2016.11.29.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 공사 변경계약건에 대하여 아래와 같이 계약을 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 2016년 도로교통소통 등 3건 교통안전표지 설치 공사

나. 변경사항 : 기간 변경

다. 변경계약 체결현황

구 분	당 초	변 경	비 고
계 약 자	****** *******	변경사항 없음
계약금액	금20,593,970원	변경사항 없음
공사기간	2016.10.26.~2016.11.30.	2016.10.26.~2016.12.15.

********************

주무관	배은하		관리단속과장	11/30 송재우
협조자	주무관	노미경
시행	관리단속과-12100	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로145(대림동711번지)	/
전화	3284-5412	/전송	841-6458	/		/	부분공개(7)