투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	재사용플라자 건립공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 박 영 배 귀하
(경유)
제목	품질관리 지적사항 통보 및 협조 요청사항 알림

1. 건축부-16113(2016.11.22)호 와 관련입니다.

2.「재사용플라자 건립공사」건설사업관리용역과 관련하여 2016.11.30. 현장확인한 바, 아래의 품질관리 지적사항과 협조 요청사항을 알려드리오니, 건설사업관리용역 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 품질관리 지적사항

○ 지상2~4층에 시공되는 금속패널(내후성강판)은 도면상 고정바+패스너로 긴결토록 되어 있으나 도면과 달리 고정바와 금속패널을 용접하여 시공되었는 바, 용접시공한 부위를 도면에 표기된 방법대로 금속패널이 견고하게 부착 될 수 있도록 재시공 할 것.

○ 목재사이딩 마감 중 창호부분의 방수지 부착 등 방수처리를 철저히 할 것.

나. 제출 및 협조요청 사항

○ 유리공사, 단열수장공사 등 부진공정 만회대책 및 동절기 시공계획서 제출

○ 건축,기계,전기,정보통신,소방공사 시공업체와 주2회 이상 공정회의를 개최하여 3차공사완료에 차질 없도록 추진

○ 오수관 연결공사는 하수도 과학관 건설사업관리단과 협의 후 대책을 수립하여 제출

○ 철근콘크리트 하도급공사 시공사(세창공영)의 장비대금(지게차등), 인건비, 자재비, 식당식비 등의 체불현황 및 체불임금 해소 대책을 수립 후 제출.

○ 설계변경 최소화하여 계약공기 내 공사가 완료 될 수 있도록 추진.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	12/01 김진용
협조자
시행	건축부-16751	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)