함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회) 시행(동부수도사업소 청사 증축공사)

우리 사업소에서 시행 중인『청사 증축 공사』에 대하여 아래와 같이  설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 동부수도사업소 청사 증축공사

나. 계약업체 : ****************

다. 공사기간 : 2016.5.19.~2016.12.30.

라. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 각종 심의사항 반영

마. 설계변경 금액 내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증 감 (원)	비고
총공사비	806,650,000	849,079,000	42,429,000
공급가액	733,318,182	771,890,000	38,571,818
부가세	73,331,818	77,189,000	3,857,182

바. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비및부대비(서비스장비                     확충 및 환경개선), 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 감리기술자 검토 보고서 1부.

3. 시공사 공문 1부.

4. 계약 심사 조정 결과 통보서 1부.

5. 계약 심사 조정 검토서 1부.

6. 설계변경 내역서(조정) 1부.

7. 합의서 1부.  끝.

주무관	손정훈		행정관리팀장	서경란		행정지원과장	이만기		★동부수도사업소장	12/01 代이만기
협조자	계약2팀장	양주춘
시행	행정지원과-31469	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-2617	/전송	02)3146-2678	/	20160125391@seoul.go.kr	/	부분공개(6)