투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공 기한 연기 의뢰(서울쌍문초등학교 옥상녹화 텃밭조성공사)

「서울쌍문초등학교 옥상녹화 텃밭조성공사」기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 서울쌍문초등학교 옥상녹화 텃밭조성공사

나. 공 사 비 : 금114,385,460원

다. 도급업체 : 주식회사 평광건설(대표자 권정훈)

2. 준공기한 연기

가. 연기기간

- 당    초 : 2016.10.25 ~ 12.03

- 변    경 : 2016.10.25 ~ 12.15

나. 연기사유 : 수요기관측 추가 시설 요청사항 검토 및 현장여건에 따른 물량 증감사항 등 설계변경 추진을 위한 절대 공기 부족

3. 지체상금 부과여부 : 미부과

첨 부 : 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	이은국		주무관	代안순호		녹지관리과장	12/01 김윤철
협조자
시행	녹지관리과-11426	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5948	/전송	02-3783-5949	/	jamijean@seoul.go.kr	/	대시민공개