문서번호	시설관리과-99
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장
김현돈	한명석	03/18 代강신재

전식방지공사 감리예산 배정 조정

2014. 03

상수도사업본부

(시설관리부)

전식방지공사 감리예산 배정 조정

서부수도사업소로부터 감리비 부족에 따른 추가 예산 배정요청이 있어 이를 검토하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 필요예산 현황(전식방지공사 감리비)

구분	사업내용	용 역 심사일	감 리 비 배정예산	필요예산 (심의결과)	비고
서부	2개소 전식공사	3.11	33,000천원	40,036천원	예산 부족 (7,000천원)
동부	3개소 전식공사	3.11	50,000천원	44,649천원	예산 남음 (5,000천원)

※ 서부수도사업소 감리비 예산 부족

Ⅱ		부족예산 대책

□ 미집행 예산 증액 배정

○ 동부수도사업소 미집행 예산을 서부수도사업소로 재배정

구 분	당초배정	변경배정	증감
서부수도사업소	33,000천원	38,000천원	증)5,000천원
동수수도사업소	50,000천원	45,000천원	감)5,000천원

□ 기타 심사금액과 차이가 나는 부족얘산은 변경설계 조치

○ 서부수도사업소의 심사금액과 대비한 추가 부족예산(2,000천원)은 감리용역수행에 지장이 없는 범위내에서 변경설계하여 발주. 끝.