투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	남부도로사업소 석면조사용역 준공기한 연기 계약 의뢰(계약이행기간 연기)

우리본부가 시행중인『남부도로사업소 석면조사용역』의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 남부도로사업소 철거대상 건축물 석면조사용역

나. 계 약 자 : ㈜대한석면조사기관(대표 신종우)

다. 계약금액 : 4,850,000원(금사백팔십오만원)

라. 계약기간 : 2016.11.4. ~ 2016.12.3.

마. 변경계약 요청 내용 : 계약이행기간

구분	변경전	변경후	비고
용역기간	2016.11.4. ~ 2016.12.3.	2016.11.4. ~ 2017.6.30.	증209일

바. 연장사유

- 석면조사용역 대상건물 4개동 중 3개동은 조사완료 하였고, 제일교회

(시흥동 961-6)만  건물주의 반대로 조사가 안됨

- 수용보상(`17.4월) 이후 석면조사가 가능하여 용역준공기한을 2017.6.30.           일로 연기함이  타당하다고 사료됨

따로붙임 : 1. 공사기간 변경 방침 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김연석		건축관리과장	곽동호		건축부장	12/01 김진용
협조자
시행	건축부-16711	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)