투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	주식회사 유신 대표 성낙일
(경유)
제목	한강 불투수포장 개선 기본 및 실시설계용역 준공기한 연장 안내

1. 우리시정에 적극 협조하여 주시는 귀 사에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2. 우리본부에서 귀 사와 계약체결하여 추진 중인 ｢한강 불투수포장 개선 기본 및 실시설계용역｣과 관련하여, 아래와 같이 준공기한 연장코자 하오니 변경 계약 등 업무 조치하시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용 역 명 : 한강 불투수포장 개선 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2016. 5. 16 ~ 2017. 2. 5

- 용 역 비 : 164,000천원

- 용 역 사 : 주식회사 유신

나. 준공기한 연장 : 60일 연장

구 분	용 역 기 간	용역비	비고
당 초	2016. 5. 16 ~ 2016. 12. 5	변동없음
변 경	2016. 5. 16 ~ 2017. 2. 3

끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	서은교		생태공원과장	12/01 최병언
협조자
시행	생태공원과-3852	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3780-0629	/전송	02-3780-0745	/	sek6425@seoul.go.kr	/	대시민공개