문서번호	도시철도설비부-13334
결재일자	2016.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
김동일		김영하	12/01 정찬웅
협조
	송변전과장		박동규

9호선 개화차량기지 유치선 증설 시스템분야 감리용역

계약기한(1차) 연장에 따른 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 개화차량기지 유치선 증설 시스템분야 감리용역

계약기한(1차) 연장에 따른 설계변경 검토보고

“지하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설 시스템분야 감리용역”에 대한 감리투입일정 조정에 따른 설계변경 보고임

용역 개요

❍ 용역명 : 서울지하철 9호선 개화차량기지 유치선 증설 시스템분야 감리용역

❍ 계약자 : ㈜경인기술, 세종기술㈜

❍ 계약 현황

(단위:천원)

구 분	계약기간	계약금액	비 고
총 차	′15. 12. 21. ~ ′18. 01. 20.	1,111,500
1 차	′15. 12. 21. ~ ′16. 12. 31.	616,178
2 차	′17. 01. 01. ~ ′18. 01. 20.	495,322

감리용역 설계변경(기간연장)

❍ 변경 사유

‣ 시공사 현장개설이 늦어져 인원 미 투입분 발생

‣ 공정에 따른 당초 투입인원보다 실제 투입인원이 적게 투입

‣ 현장 시공일정에 따른 감리원 배치 조정

❍ 변경 방향

‣ 감액 준공처리 후 재계약보다는 감액만큼 계약기간을 연장

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	616,178	616,178	변경없음
계약기간	′15. 12. 21. ~′16. 12. 31.	′15. 12. 21 ~′17. 1. 25.

❍ 예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 9호선 전동차 38량구매 및 개화차량기지 유치선 증설, 시설비

붙임  1. 용역계약서 1부

2. 1차 계약내역서 1부

3. 1차 설계변경 내역서 1부

4. 합의각서(1차) 1부.  끝.