투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	총무과장
(경유)
제 목	2016년 한양도성박물관 하반기 특별전 전시시설물 제작·설치 용역 계약변경 의뢰

1. 한양도성연구소-3168(2016.11.30) 및 0000(2016.11.30)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 ‘016년 한양도성박물관 하반기 특별전 전시시설물 제작·설치 용역’에 대하여 아래와 같이 계약을 변경하고자 합니다.

가. 건 명 : 2016년 한양도성박물관 하반기 특별전 전시시설물 제작·설치 용역

나. 계약대상자 : 상상디자인(대표 : 최창호)

다. 계약 변경 사항

구분	변경전	변경후	변경내역
과업내용	전시물 제작, 설치, 철거	전시물 제작, 설치	철거항목 삭제
계약금액	20,300,000원	18,854,000원	△1,446,000원
계약기간	2016.9.6.~2016.12.20	2016.9.6.~2016.12.20	변동 없음

라. 변경 사유 : 2016년 하반기 특별전 전시기간 연장

붙임 1. 전시기간 연장 계획 1부

2. 변경계약 계획 1부

3. 변경산출내역서 1부

4. 합의각서 1부. 끝.

	한양도성연구소장
주무관	조은주		한양도성연구소장	12/01 최형수
협조자
시행	한양도성연구소-3176	(		)	접수		(		)
우	03098	서울시 종로구 율곡로 283 서울디자인지원센터 607호	/
전화	02)724-0288	/전송	08)474-9986	/		/	대시민공개