문서번호	방재시설부-18964
결재일자	2016.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
고소영		김인숙	12/01 임춘근
협조

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

식재포트 방근방수 공법변경 실정보고 검토보고

2016.11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

식재포트 방근방수 공법변경 실정보고 검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」식재포트 방수방근 공법변경 실정보고에 대한 검토 보고임.

【관련근거 : 서울역(건)제16-442호(2016.11.24.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문 5가 ~ 만리동 1가 62

○ 시 공 사 : 홍익건설산업(주), ㈜동원개발

○ 도 급 비 : 1,963,173,000원(조경 : 4,948,900,000원)

○ 공사기간 : 2016.04.18. ~ 2017.05.17.

□ 보고내용

○ 식재포트 방근방수 공법변경

- 변경사유 : 식재포트의 조명방식 변경에 따라 포트를 상부,하부로 별도 제작하여 접합함으로 포트내부에 턱이 발생하며 조명용 안정기함이 돌출되어 시트부착 공법이 부적합하며, 인포가든 시공시 제기된 포트 내부에 바탕면 처리를 실시하여 액상스프레이 공법으로 변경하고자 함.

- 수량 변경

공 종	당 초			변 경			비 고
	규 격	단위	수 량	규 격	단 위	수 량
식재포트 방근방수층 설치	내근시트	㎡	3,841.5	액상도포	㎡	3,459.1	변경
식재포트 바탕면 처리		㎡	-		㎡	3,459.1	신규

- 공법 비교

구 분	시공 방법	규 격	비 고
변경전	FRP, 내근시트 부착	내근시트 T=1.5mm
변경후	액상 스프레이	Polyurea 도막 T=3mm

- 변경 전․후 현황

변경전 : 일체형 설계	변경후 : 상,하부 턱 발생, SMPS함 부착
내근시트 시공 현황(일체형, 2016. 6.)	Polyurea 도포 시험시공(2016. 10.)

○ 공사비 증감내용

공 종	단위	변경전			변경후			증 감(천원)	비 고
		수량	단가	금액(천원)	수량	단가	금액(천원)
포트 방근 방수	㎡	3,841.5	33,659	129,301	3,459.1	61,209	211,728	+) 82,427	견 적
바탕면 고르기	㎡		-		3,459.1	7.272	25,154	+) 25,154
직접공사비				129,301			236,882	+) 107,581
제경비				41,580			48,381	+) 6,800
공급가액				170,881			285,263	+) 114,381
부가 가치세				17,088			28,526	+) 11,438
합 계				187,970			313,790	+) 125,820

○ 수량 산정기준

- 실시설계 도서 적용

- 관련근거 : 토목부-22440(2016.11.2.) 서울역 7017프로젝트 기본 및 실시

설계 도서 송부

○ 신규단가 적용

- 강제협의율 적용 : 90.014% <(낙찰율 80.027% + 설계가 100%)*1/2>

- 관련근거 : 방재시설부-17936(2016.11.15.) 협의율 조정회의 결과 알림

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 서울역 7017 프로젝트 건설공사중(조경) 식재포트의 방근,방수 공법 변경 요청을 검토한 결과, 설계자의 요청으로 식재 포트에 밴드형 조명기를 부착함에 따라 일체형 포트가 상,하부를 분리하여 제작하므로 내부구조가 변경되었고, 조명용 SMPS함과 전선용 배관이 포트내부에 설치되어 시트부착 공법은 포트의 방근 방수효과를 기대할수 없으며 Polyurea 스프레이 공법으로 시험시공 결과 돌출부위 시공에 적합하여 바탕면을 연마 처리후 액상 도포 방식으로 변경 하는것이 타당할 것으로 판단되며 면적 감소에 대한 실정보고 후 추후 설계 변경에 반영 하고자함.

□ 보고자 의견

○ 식재포트 방근방수 공법 변경에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고 향후 설계변경 시 정산 반영 조치하고자 함

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.