함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2016년 아리수 직결음수대 설치공사(서울공업고등학교외 10개소))

우리사업소에서 시행 중인 「2016년 아리수 직결음수대 설치공사(서울공업고등학교외 10개소)」에 대하여 본부 재무회계과의 계약금액 조정심사를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 아리수 직결음수대 설치공사(서울공업고등학교외 10개소)

나. 공사기간 : 2016. 07. 07. ~ 2016. 12. 03.

다. 계 약 자 : ㈜영풍디엔씨  대표 최태선

라. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증감 및 신규공종 발생

마. 설계변경 내역                                              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	86,899,582	111,144,000	증)28,244,418

바. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비(음수대 설치사업)

붙임   1. 설계변경 보고서류 각 1부.

2. 합의서 및 설계변경 내역서 각 1부.  끝.

주무관	강판오		시설관리팀장	고신석		시설관리과장	천성훈		남부수도사업소장	12/02 전영석
협조자	주무관	정은희		행정지원과장	이두영
시행	시설관리과-33936	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4595	/전송	02-3146-4639	/	kpo8585@seoul.go.kr	/	부분공개(7)