다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. ♡ 응답소 ♡
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	시설물 인수인계를 위한 사전점검 결과 통보(신내3지구 방음벽)

1. SH공사 토목3팀-1201호(‘14. 2.21) 및 도로시설과-19572호(‘13.11. 7)와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 시행한‘신내3지구 국민임대주택단지 조성공사’와 관련하여 신설한 북부간선도로변 방음벽에 대하여 사전점검을 시행하고 아래와 같이 회신하오니, 지적사항에 대하여 조속히 조치후 결과를 우리시로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 북부간선로변 방음벽 신설에 따른 인수인계 사전점검

나. 위    치 : 중랑구 신내동 65-13 북부간선로(시내 방향)

다. 점검 사항

- 인수인계 방음벽 상태 점검(H=13.0m, L=534m)

- 굴착공사에 따른 협의 사항 이행 여부

라. 점검 결과 지적사항

1) 토공구간 다짐 및 면정리 필요(첨부 사진1)

2) 굴착에 따른 기존 포장 종방향 균열부 재포장 시행(첨부 사진2)

3) 열화 및 재료분리 빗물받이 재시공(첨부 사진3)

4) 파손 앵커 볼트 재시공(첨부 사진4)

5) 앵커 볼트 보호캡 탈부착 가능토록 방법 제시(첨부 사진5)

6) 방음벽 세척 필요(첨부 사진6)

7) 기존 협의시 대책마련 요청 사항 제출

- 조립식 방음벽 기초 저판과 벽체 연결부 결속 안전성 확보 여부 확인 자료

- 강봉 매입에 따른 강봉 부식 등 향휴 유지관리 문제 해결 방안

- 조립식 방음벽의 향휴 유지관리 방안

첨  부 : 사전점검 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조현범		전용도로팀장	代이영호		도로시설과장	전결 03/18 이용심
협조자
시행	도로시설과-4757	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2동 1층	/
전화	02-2133-1669	/전송	02-2133-1078	/	badahorange@seoul.go.kr	/	대시민공개