문서번호	도시철도사업부-11204
결재일자	2016.12.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
정영호		김형건	12/02 박동룡
협조
	주무관		박형복

- 우이~신설 도시철도 민간투자사업(4공구) -

´16년 12월 휴일 감리 근무계획 승인 검토 보고

2016. 12.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

2016년 12월  휴일 감리 근무계획 승인 검토 보고

우이~신설 도시철도 민간투자사업(4공구) 건설공사 관련 ´16년 12월 휴일작업에 따른 감리 근무계획 승인 요청에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ				휴일근무 승인 요청내용

관련근거 : 도화(우이경감) 제2016-492호(2016. 12. 01)

휴일 근무일자

- 12. 3(토), 12.4(일), 12.10(토), 12.11(일), 12.17(토), 12.18(일), 12.24(토), 12.25(일)

Ⅱ				휴일 근무 계획

관련근거

- 책임감리 입찰안내서 제4장 계약조건 제14조 및 제6장 6.2

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제11조③항(건설사업관리기술자의 근무수칙)

근무사유

- 원활한 공정추진을 위한 연속적인 작업시행을 통해 정거장 및 환기구 공정을 신속하게 추진하여 시민불편 해소에 만전을 기하고자 함.

휴일근무 주요내용

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		비 고
12. 3(토)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 환승연결통로 구조물 공사	*** *******
		L12정거장 (보문역)	외부 E/V 구조물 공사
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 구조물 공사

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		비 고
12. 4(일)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 환승연결통로 구조물 공사	*** *******
		L12정거장 (보문역)	외부 E/V 구조물 공사
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 구조물 공사
12. 10(토)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 환승연결통로 구조물 공사	*** *******
		L12정거장 (보문역)	외부 E/V 구조물 공사
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 구조물 공사
12. 11(일)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 환승연결통로 구조물 공사	*** *******
		L12정거장 (보문역)	외부 E/V 구조물 공사
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 구조물 공사
12. 17(토)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 환승연결통로 구조물 공사	*** *******
		L12정거장 (보문역)	외부 E/V 구조물 공사
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 구조물 공사
12. 18(일)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 환승연결통로 구조물 공사	*** *******
		L12정거장 (보문역)	외부 E/V 구조물 공사
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 구조물 공사
12. 24(토)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 환승연결통로 구조물 공사	*** *******
		L12정거장 (보문역)	외부 E/V 구조물 공사
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 구조물 공사
12. 25(일)	주 간 (감리원 1인)	L11정거장 (성신여대입구역)	#5출입구 환승연결통로 구조물 공사	*** *******
		L12정거장 (보문역)	환승 연결통로 구조물 공사
		L13정거장 (신설동역)	외부 E/V 구조물 공사

Ⅲ				검토 결과

작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일작업 승인조건을 부여하고 감리원의 휴일근무 계획을 승인코자 합니다.

< 책임감리 휴일작업 승인조건 >

- 휴일작업에 소요되는 감리비는 시공사 부담(책임감리 입찰안내서 제6장 6.2 원인자 부담)

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

- 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

< 업무지시 >

- 감리원은 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

- 감리자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

- 휴일 작업계획의 변경시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행토록 할 것

- 사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련절차에 따라 상황 보고토록 할 것

- 작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

- 휴일작업시 발파를 지양하고 소음, 진동발생, 교통관리 작업관리 철저

- 소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원발생 관리철저

붙  임 : 휴일 작업 감리근무계획 승인 요청 공문 1부.  끝.