문서번호	물관리정책과-4242
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	오염총량팀장	물관리정책과장	물관리정책관
윤정	윤맹진	배광환	03/18 정만근

『서울특별시 지하수관리계획 수립 용역』

1차분 준공 및 2차분 계약 시행 계획

2014. 3.

도시안전실

(물관리정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 ■	(	지방계약법 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『서울특별시 지하수관리계획 수립 용역』

1차분 준공 및 2차분 계약 시행 계획

『서울특별시 지하수관리계획 수립 용역』과 관련 ‘14.3.26.자로 종료되는 장기 1차 계약을 준공처리하고 잔여 10개월에 대해 장기 2차 계약을 시행하고자 함

Ⅰ		계약 개요

건  명 : ‘서울특별시 지하수관리계획 수립 용역’

방  법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약), 장기계속계약

상대자 : 한국지질자원연구원 컨소시엄

(한국지질자원연구원, 지오그린21, 한국환경정책평가연구원)

계약기간

○ 총  차 : ‘13. 5. 27.~ ’15. 1. 26.(착수일로부터 610일)

- 1차분 : ‘13. 5. 27.~ ‘14. 3. 26.(착수일로부터 304일)

- 2차분 : ‘14. 3. 27.~ ‘15. 1. 26.(’15.1.27.부터 306일)

계약 금액

○ 총   차 : 650,472,680원

- 1차분 : 339,338,940원

- 2차분 : 311,133,740원

주요과업

○ 서울특별시 지하수 보전·관리 및 개발·이용계획 수립

○ 서울특별시 지하수 특성에 적합한 지하수 관리계획 수립 등

Ⅱ		1차분 용역 준공

준공 예정일자

○ ’14. 3.26.

지급 금액

○ 203,603,370원(1차분 계약금액 – 선금 지급금액)

▸ 선금 지급금액 : 135,735,570원(지급일자 : ‘13. 7.22.)

▸ 정산금 미 발생으로 계약금액 불변(붙임의 ‘정산 내역서’ 참조)

※ 예산 과목(‘13년예산 사고이월비)

부서)도시안전실 물관리정책과, 정책)깨끗한 물관리, 단위)지하수 및 토양오염  관리,           세부)서울시 지하수관리계획 수립1차, 편성목)시설비 및 부대비, 통계목)시설비

Ⅲ		2차분 용역 계약

계약 기간

○ ‘14. 3. 27. ~ ’15. 1. 26.

▸ 총차 기간에서 1차분 계약기간을 제외한 기간(당초 계약내용과 변동사항 없음)

계약 금액

○ 311,133,740원

▸ 총차 계약금액에서 1차분 계약금액을 제외한 계약 금액임

※ 예산 과목

부서)도시안전실 물관리정책과, 정책)깨끗한 물관리, 단위)지하수 및 토양오염  관리,           세부)서울시 지하수관리계획 수립2차, 편성목)시설비 및 부대비, 통계목)시설비

계약 의뢰(재무과)

○  ‘14. 3. 19.(수)

Ⅳ		향후 추진 계획

○ ‘14. 3.19.  : 2차분 용역계약 의뢰(⇒ 재무과)

○ ‘14. 3.26.  : 1차분 용역 준공처리(준공일자 : ’14.3.26.)

○ ‘14. 3.27.  : 2차분 용역 계약체결(재무과)

○ ‘14. 4. 7.  : 1차분 용역 준공검사 완료

○ ‘14.11월    : 최종보고서 제출

○ ‘14.12월    : 최종보고서 승인 요청(⇒ 국토교통부)

○ ‘15. 1월     : 준공처리

붙임  1. 1차분 용역 경비 정산내역(영수증 및 증빙서류 별도첨부) 1부.

2. 총차 및 1, 2차분 용역 설계내역서 1부.  끝.