문서번호	교통운영과-23231
결재일자	2016.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	신호운영팀장	교통운영과장
강민우	代이용현	12/02 강진동

공사 실정 보고

(교통신호제어용 차량검지기 유지보수 본공사4차(연간단가))

2016. 11

공사 실정 보고

(교통신호제어용 차량검지기 유지보수 본공사4차(연간단가))

교통신호제어용 차량검지기 유지보수 본공사 4차 공사중 공사실정사항이 발생하여 아래와 같이 검토하여 공사에 반영코자 함

1		공사개요

가. 공 사 명 : 교통신호제어용 차량검지기 유지보수 본공사4차(연간단가)

나. 공사장소 : 건대후문 등 8개 교차로

다. 작업기간: 2016.11.21. ~ 11.30

라.  계 약 자 : ㈜신한네오텍 대표 강미순

마. 공 사 비 : 금70,660,000원

2		실정사항 보고내용

가. 현장여건에 따른 작업변경 사안발생

1. 작업불가

1) 장소: 잠실대교 남단 교차로

2) 문제점: 공사시작전 해당교차로쪽에 보,차도 구획 재정비 시공중으로 작업불가

2. 본공사 추가 요청건

1) 장소: 서울성모병원

2) 요청사항: 서울성모병원 교차로 보드이상으로 현장 확인후 조치한 사항을 본공사4차 설계내역에 추가

3. 작업지점변경

1) 장소: 잠실대교 북단 교차로

2) 변경이유: 앞막힘신설 필요성이 더 요구되는 군자교지점의 교통상황으로 인하여 공단에서 변경요청

나. 검토의견

1) 잠실대교 남단은 본공사에서 제외

2) 서울성모병원 현장점검 조치한 내용은 본공사 4차설계분에 추가반영

3) 잠실대교 북단은 군자교지점으로 대체

3		예산 변경 내역

가. 작업내용 변경후 예산 변경 내역

(단위:원)

구 분	준공예정금	항목	비고
변경전	금70,660,000	기존 준공 예정금액
변경후	금64,370,000	잠실대교 남,북단 제외후 예정금액 (서울성모병원지점 점검조치,군자교포함)
증·감 금액		감액6,290,000

4		조치계획

가. 잠실대교 남단 삼거리는 작업지시에서 제외하고, 서울성모병원 현장점검 조치한 내용은 본공사 4차설계분에 추가반영하고, 잠실대교 북단 사거리는 군자교로 대체신설하여 설계변경 및 반영토록하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 실정보고 2부.

2. 본공사4차 변경설계내역서 1부.

3. 검지기단선현황 1부.  끝.