투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 한강준설(저수로,취수장)정비공사 감독권한대행 건설사업

1. 치수과-4139(2016.11.23.)호와 관련입니다.

2. 「한강준설(저수로,취수장)정비공사 감독권한대행 건설사업」건에 대하여 다음과 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

공 사 명	한강준설(저수로,취수장)정비공사 감독권한대행 건설사업
계약상대자	(주)대한콘설탄트 (대표 : 이우정)
계 약 금 액	금195,379,000원(금일억구천오백삼십칠만구천언)
계 약 일 자	2016.03.31.
공 사 기 간	2016.04.04. ~ 2016.11.29.

나. 변경내역 : 공사기간 변경(2016.04.04. ~ 2016.12.30.)

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2016.04.04. ~ 2016.11.29.	2016.04.04. ~ 2016.12.30.

다. 변경사유 : 건설사업관리자 투입계획 변경

붙     임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 계약의뢰서 1부.

3. 납부필증빙서 1부.

4. 용역계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	12/02 이상국
협조자
시행	총무과-21351	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)