투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2016년 한강르네상스호 중간검사 및 수리 용역

1. 수상안전과-5918(2016.11.21.)호와 관련입니다.

2. 「2016년 한강르네상스호 중간검사 및 수리 용역」건에 대하여 다음과 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

공 사 명	2016년 한강르네상스호 중간검사 및 수리 용역
계약상대자	지성엔지니어링 (대표 : 김창덕)
계 약 금 액	금82,181,000원(금팔천이백일십팔만일천원)
계 약 일 자	2016.10.27.
공 사 기 간	2016.11.02. ~ 2016.12.05.

나. 변경내역 : 금액 변경(증10,486,520원)

변 경 내 역	변경전	변경후
금 액 변 경	82,181,000	92,667,520

다. 변경사유 :  검사관 지적사항 발생으로 선저외판 교체 및 추가 정비

붙     임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 계약의뢰서 1부.

3. 추가계약보증금 1부.

4. 용역계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	12/02 이상국
협조자
시행	총무과-21339	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)